＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	중부수도사업소
수신	(주)이준엔지니어링 대표 나석근
(경유)
제목	현장 실정보고에 대한 회신(보광배수지 1,2지 내부방수방식공사)

1. 이준중부-1708-111(’17.11.24)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련『보광배수지(1,2지) 내부 방수·방식공사』의 현장실정보고에 대하여 아래와 같이 회신하오니 배수지 내부 방수·방식공사에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

㈜이준엔지니어링 건설사업기술관리자 실정보고		비 고
공사실정	검토의견
❍ 배수지 1지 폐기물 발생에 따른 실정보고(신규공정) - 보광배수지 1지 그라인딩(콘크리트+페인트면) 작업으로 인한 폐기물(폐합성수지) 및 처리 비용 발생 (1지 10.88톤 + 2지 10.88톤(예상) = 21.76톤)	❍ 폐기물 관련하여 설계에 기 반영되지 않았으나 그라인딩(콘크리트+페인트면) 작업시 발생된 폐기물 이므로 시공사에서 제시한 처리비 보다 저렴한 환경부 고시 금액으로 적용하여 설계변경 시 반영함이 타당함. - 개략공사비 : 증)3,982천원	〇 검토결과 : 타당함. 그라인딩 작업중 발생된 폐기물로 반드시 중량확인 후 반출 및 설계변경 시 사진 등 근거자료를 확보하여 보고토록 조치하고자 함.

끝.

	중부수도사업소장
주무관	최성태		주무관	유명수		급수운영과장	11/28 유용일
협조자
시행	급수운영과-27377	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-2158	/전송	3146-2189	/		/	부분공개(5)