문서번호	교량안전과-21599
결재일자	2017.11.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		특수교량팀장	교량안전과장
우창원		정준용	11/28 한유석
협조

한강상 PSC교량 안전강화공사(원효대교)

설계변경 승인 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 11.

안전총괄본부

(교량안전과)

한강상 PSC교량 안전강화공사(원효대교)

설계변경 승인 검토 보고

우리시와 도급계약을 체결하고 시행중인『한강상PSC교량 안전강화공사(원효대교)』시행과 관련 한강교량 보수·보강공사 건설사업관리용역 감리단으로 부터 설계변경 보고서가 제출되어 설계변경 승인 검토 보고 사항임

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 한강상 PSC교량 안전강화공사(원효대교)

○ 공사기간 : 2017.06.05. ~ 2017.12.01.

○ 공사금액 : 1,591,636,000원

(도급비 1,400,063천원, 관급비 140,800천원, 이전비

50,773천원)

○ 시  공  사 : ㈜성익건설

○ 감  리  사 : ㈜동성엔지니어링외 2개사

○ 공 사 개 요 : 절삭후아스팔트덧씌우기 74.5a, 상판보수 1,863㎡

□ 설계변경 검토 보고

○ 실정보고 및 현안사항에 대한 설계변경 내용

1) 1회설정보고 : 교량안전과-17011호(2017.9.18)

- 원효대교 B램프(토공부) 및 N램프(교량부+토공부) 교면포장 및 미끄럼방지포장

2) 2회실정보고 : 교량안전과-21266호(2017.11.23)

- 기존 아스팔트 절삭후 상판을 조사한 결과 2차선에 강봉이 노출, 강봉주위 박리 및 열화현상이 발견되어 강봉 주위 상판보수를 시행, 전반적으로 교량상판의 상태는 양호하며, 부분적 열화현상 및 백화가 발생한 부분에 대하여 상판보수

3) 기존 아스팔트 포장 실측결과에 따라 수량변경(바탕처리, 교면방수, 성형 및 주입줄눈, 유공관등)

4) 제경비(국민연금,건강,고용,노인장기보험료, 안전관리비, 환경보전비) 등 정산

5) 포장두께 변경 따라 관급비(아스팔트콘크리트) 및 이전비(폐기물 처리비) 정산등

○ 주요 수량 변경

공 종		단위	당초	변경	증,감
포장공	아스팔트 절삭	㎥	596	1,113	증)517
	텍코팅	a	74.5	104.8	증)30.3
	절삭후 아스팔트 덧씌우기	a	74.5	92.8	증)18.3
교면방수공	교면방수 - 바탕처리	㎡	7,450	6,989	감)461
	교면방수 - 도막식	㎡	7,450	8,060	증)610
	성형줄눈 및 주입줄눈 설치	m	2,000	2,076	증)76
교량상부공	상판보수 t=30mm	㎡	1,006	72	감)934
	상판보수 t=50mm	㎡	857	1,000	증)143
	차선도색(백색, 실선)	㎡	244	446	증)202
	도로표지병	개	0	80	증)80

□ 공사비 증ㆍ감현황

구 분	당 초(원)	변 경(원)	증ㆍ감(원)
도급액	1,400,063,000	1,157,395,000	(감)242,668,000
관급자재비	140,800,000	255,196,750	(증)114,396,750
이전비 기타	50,773,000	50,446,660	(감)326,340
총공사비	1,591,636,000	1,463,038,410	(감)128,597,590

□ 검토결과 처리계획

○ 기 실정보고 및 현안사항에 대한 설계변경 보고내용을 검토한 바, 현장여건에 맞게 적정하게 적용 한것으로 사료되어, 상기사항과 같이 감리사에 설계변경시행토록 승인 통보코자 합니다.

※ 관련근거 : 동성감리 2017-355호(‘17.11.24) 설계변경 도서 제출

붙임 : 1. 설계변경도서 제출 서류 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.