투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(매봉터널 외 3개소 보수공사 건설폐기물처리용역)

우리사업소에서 시행중인 『매봉터널 외 3개소 보수공사 건설폐기물처리용역』에 대하여 아래과 같이 설계변경 시행코자 합니다.

가. 용 역 명 : 매봉터널 외 3개소 보수공사 건설폐기물처리용역

나. 공사기간 : 2017. 05. 11. ~ 2017. 12. 31.

다. 계 약 자 : 청한산업개발(주) 외 1개사 대표 차중환

라. 변경사유 : 공종별 물량 증․감 사항 발생

마. 변경내역                                                    (단위 : 원)

구 분		금 액		증 ․ 감	비 고
		당 초	변 경
용역비	계	26,709,000	31,460,000	증) 4,751,000
	공급가액	24,280,909	28,600,000	증) 4,319,091
	부가가치세	2,428,091	2,860,000	증) 431,909

바. 예산과목별 변경내역                                        (단위 : 원)

예 산 과 목	금 액		증 ․ 감	비 고
	당 초	변 경
계	26,709,000	31,460,000	4,751,000
교량안전과,교량관리,교량시설물운영, 도로시설물운영,도로시설물(교량)일상유지보수, 시설비	17,939,000	25,531,000	7,592,000
도로시설과,도로시설관리,지하차도시설관리, 가락지하차도외 1개시설(천호지하차도) 보수, 시설비	627,950	0	-627,950
도로시설과,도로시설관리,터널시설관리, 매봉터널보수,시설비	8,142,050	5,929,000	-2,213,050

붙  임 : 1. 설계변경 검토보고 1부.

2. 설계변경 내역서   1부.

3. 설계변경 사유서   1부.  끝.

주무관	김부호		시설보수과장	代나철흠		동부도로사업소장	11/28 송만규
협조자	주무관	나철흠		★주무관	이상하
시행	시설보수과-8694	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33 (대치동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0371	/전송	02-2040-0308	/	jam747@seoul.go.kr	/	대시민공개