투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	총무과장
(경유)
제 목	준공기한 연기 계약 의뢰

1. 시설과-7462(’17.11.27)호와 관련입니다.

2.『서울대공원 동물.조류격리사 설치 전기공사』 준공기한 변경계약을 의뢰하오니 협조     하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울대공원 동물.조류 격리사 설치 전기공사

나. 준공기한 변경내용

계 약 자	변경전	변경후	비 고
****** **********	‘17.09.20~11.30	‘17.09.20~12.20	계약금액 변경없음

- 연기사유 : 건축 등 선행 공정인 동물.조류 격리사 설치 전기공사의 준공기한이

`17.12.20까지 연기됨에 따라 조명등 설치 등 전기공사 연기가 필요함.

- 지체상금 부과여부 : 미부과.

첨  부 : 1. 방침서(준공기한 연기보고서) 1부.

2. 준공기한 연기의회서 및 합의각서 각 1부.  끝.

	시설과장
전문관	황인공		주무관	代황인공		시설과장	11/28 오임석
협조자
시행	시설과-7509	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102 서울대공원 시설과	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7431	/전송	02-507-7230	/		/	부분공개(7)