＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	강서수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경계약 체결 보고 〔강서수도사업소 청사증축 및 리모델링 공사 건설폐기물 처리용역〕

1. 행정지원과-27161호(‘17.11.27.)와 관련하여 아래와 같이 변경계약 체결되었음을 보고드립니다.

가. 계약명: 강서수도사업소 청사증축 및 리모델링 공사 건설폐기물 처리용역

나. 계약상대자: ****************

다. 변경계약일자: 2017. 11. 28.

라. 용역기간

1) 변경전: 2017. 4. 3. ~ 2017. 12. 2.

2) 변경후: 2017. 4. 3. ~ 2017. 12. 20.

마. 완수기한 연기사유: 건축공사 연장에 따른 폐기물 용역 기한연장

바. 계약금액:

(단위: 원)

구 분	변경전	변경후	증ㆍ감액	비 고
계약금액	**********	**********	*

붙임: 변경계약서 사본 1부.  끝.

주무관	김범진		행정관리팀장	심정섭		행정지원과장	11/28 김창년
협조자	주무관	정경승
시행	행정지원과-27248	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-3843	/전송	02-3146-3879	/	bjk912@seoul.go.kr	/	부분공개(5)