문서번호	주거재생과-14366
결재일자	2017.11.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주거재생사업팀장	주거재생과장
이재훈		代이재훈	11/28 代이영세
협조

성수동 붉은벽돌건축물 보전관리계획 수립용역 준공기한 연기 검토 보고

2017. 11.

도시재생본부

(주거재생과)

성수동 붉은벽돌건축물 보전․관리계획 수립용역

준공기한 연기 검토 보고

성수동 일대 붉은벽돌건축물의 보전 및 활성화 방안 마련을 위해 추진 중인 ｢성수동 붉은벽돌건축물 보전․관리계획 수립용역』의 내실있는  과업을 위해 용역기간을 연장하여 추진코자 함.

Ⅰ		용역개요

❍ 용 역 명 :「성수동 붉은벽돌건축물 보전관리계획 수립」용역

❍ 계약기간 : ’17.08.02. ~ ’17.11.30.

❍ 용 역 비 : 금42,000천원(부가세 포함)

❍ 용역업체 : (주)싸이트플래닝건축사사무소(대표 한영숙)

Ⅱ		추진현황

❍ ’17.08.02 : 용역 계약 및 착수

❍ ’17.08.22 : 용역 착수보고

❍ ’17.09~11 : 전문가 자문 등 공정회의 운영

❍ ’17.11.14 : 용역 중간보고

- 시범사업 지역 내 정비기반시설 지원 등 공공 사업계획 수립

Ⅲ		계약변경 사항

❍ 계약변경 내용

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
용역기간	’17.08.02~’17.11.30	’17.08.02~’17.12.19	19일 연장
용 역 비	금42,000천원(부가세 포함)		변경 없음
용역업체	(주)싸이트플래닝건축사사무소(대표 한영숙)		변경 없음

❍ 용역기한 연장사유

- 붉은벽돌건축물 보전․관리를 위한 기본구상 및 활성화 계획 수립  과정에서 시범사업지역 발굴 및 그에 따른 정비기반시설 정비 등 공공 사업계획 수립이 필요함에 따라 내실있는 성과물을 완성하기 위해 용역기간 연장 필요.

Ⅳ		향후계획

❍ ’17.11.30 : 준공기한 연기

❍ ’17.12.05 : 시범사업 지역 내 정비기반시설 정비 계획(안) 보고

❍ ’17.12.11 : 최종보고

❍ ’17.12.19 : 용역준공

붙 임 : 1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 과업내용서(변경) 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.