문서번호	토목부-24860
결재일자	2017.11.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	토목설계과장	토목부장
이상욱B	여용석	11/28 김영수
협 조

설계용역 준공기한 연기 보고

(예장동 유스호스텔 앞 긴급지반보강 및 하수관개량 실시설계)

2017. 11.

도시기반시설본부

(토목부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

설계용역 준공기한 연기 보고

(예장동 유스호스텔 앞 긴급지반보강 및 하수관 개량 실시설계)

지반침하에 따라 긴급 수행 중인『예장동 유스호스텔 앞 긴급지반보강 및 하수관 개량 실시설계』준공기한을 연기하고자 검토보고 드림

※준공기한 : 당초)2017.11.30. → 변경)2017.12.22.(증22일)

▢ 용역 개요

◦ 용 역 명 : 예장동 유스호스텔 앞 긴급지반보강 및 하수관 개량 실시설계

◦ 위    치 : 서울 중구 예장동 유스호스텔 앞

◦ 규    모 : - 지반보강 : 3,230㎥ (646㎡×5m)

- 하수관 개량 : D=300~600㎜, L=250m

◦ 용역기간 : 2017.10.31. ~ 2017.11.30.(1개월)

◦ 용역금액 : 64,000,000원

◦ 용 역 사 : ㈜다산이엔지

▢ 근 거 : 다산이엔지 17-109호(2017.11.27.) 용역기간 연장 요청

▢ 추진현황

◦ ＇17. 7. 4. : 최초 지반침하 발생

◦ ＇17. 7. 5. : 2차 지반침하 발생

◦ ＇17. 7. 9. : 3차 지반침하 발생

◦ ＇17. 7.20. : 합동 원인조사

(서울종합방재센터, 도로관리과, 중부공원녹지사업소, 중구청)

→ 침하구간 지하5m지점에서 하수관 파손 발견

◦ ＇17. 7.27. : 지반침하 원인분석 및 보강공법 검토 용역시행(서울종합방재센터)

→ 용역사 : ㈜다산이엔지

◦ ＇17. 8.16. : 예장동 유스호스텔 앞 긴급복구사업 추진계획(행정2부시장 방침 제186호)

◦ ＇17. 9. 5. : 재난관리기금 운용심의위원회 결과 및 예산 재배정 통보

◦ ＇17. 9.20. : 긴급복구공사 의뢰(서울종합방재센터 → 토목부)

◦ ＇17. 9.27. : 실시설계용역 추진계획(토목부)

◦ ＇17.10.31. : 용역 착수

▢ 보고내용

가. 용역금액 및 용역기간                                (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
용역금액	64,000,000	64,000,000	변경없음
용역기간	'17.10.31.~'17.11.30.	'17.10.31.~'17.12.22.	증)22일

나. 준공기한 연기 사유

◦ 본 용역은 지반침하로 인해 긴급시행하여 설계 진행중이나, 지장물(하수관)의 위치가 도면과 상이하며, 파손된 하수관의 매설심도가 깊어 정확한 현장조사 및 설계가 어려운 실정임.

◦ 설계와 시공을 병행하는 Fast-Track방식을 적용하여 지장물 현황을 정확히 파악하고, 시공시 안전 확보 및 공기를 단축하고자 함.

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

▢ 향후계획

◦ '17.12.22. : 용역 준공

붙임 : 용역기간 연장요청 공문 1부.  끝.