문서번호	기반시설과-4576
결재일자	2017.11.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기반시설과장	시설부장
이건용	박일연	11/29 최진석
협 조

준공기한 연기 검토 보고

-풍납토성, 나루터길 나들목 개선 전기공사-

2017. 11.

시설부장

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

준공기한 연기 검토 보고

<풍납토성, 나루터길 나들목 개선 전기공사>

「풍납토성, 나루터길 나들목 개선 전기공사」추진 중 감독대행(서울시설공단)으로부터 준공기한 연기에 대한 검토 보고임.

□ 공사 개요

○ 공 사 명: 풍납토성, 나루터길 나들목 개선 전기공사(장기계속)

○ 공사기간: (금차)‘17. 9. 29. ~ ’17. 12. 31.

(총차)‘17. 9. 29. ~ ’18. 12. 31.

○ 공사개요: 분전함 이설 및 한전 인입공사, 이중육갑문 동력 및 조명설비, 나들목 통로 조명설비, CCTV 철거 및 설치

○ 도 급 액: 금316,491,200원

○ 도 급 자: ㈜선연이엔지(대표이사: 장석선)

○ 감독위탁: 서울시설공단(공사감독3처)

□ 감독대행(서울시설공단) 실정보고 내용

○ 풍납토성, 나루터길 개선공사 구간 하천점용 허가 지연

○ 동절기로 인한 굴착작업 불가

□ 실정보고 검토 내용

○ 전기공사 준공기한 연기

- 장기계속공사 계약으로 1차 공사가 회계연도에 따라 연말까지 계약된 사항이며,

- 하천점용 허가 지연으로(금차)전기공사 개시가 지연되었으며,  전기공사 특성을 감안 준공기한을 연장 하고자 함

○ 준공기한

- 당초: ‘17. 09. 29. ~ ’17. 12. 31.

- 변경: ‘17. 09. 29. ~ ’18. 12. 31.

□ 조치 내용

○ 위와 같은 실정으로 (금차)전기공사 준공기한을 ‘18. 12. 31.까지 연장하여 공사 추진에 철저를 기하고자 함

붙임: 감독대행 준공기한 연기 검토 보고서 1부.  끝.