＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	2018년 배급수관 정비사업 대상 선정 및 심사계획 알림

1. 2018년도 배급수관 정비사업 계획(안)을 아래와 같이 알려드리오니 사업 대상을 선정하여 2017. 12. 11.(월)까지 제출(급수운영과 수합)하여 주시기 바라며,

2. 제출된 배급수관 정비사업은 심사를 거쳐 2018년도 사업으로 확정코자 하오니 사업 우선순위 기준에 따라 대상 선정에 철저를 기하여 주기기 바랍니다.

가. 노후 배급수관(350mm 이하)정비 연차별 정비계획

1). 사업소별 정비계획

(단위 : km)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
정비 계획	소계	149	26.3	7	24.5	13.9	14.6	28.4	17.4	16.9
	2018년	58	10.2	2.7	9.5	5.4	5.7	11.1	6.8	6.6
	2019년	60	10.6	2.8	9.9	5.6	5.9	11.4	7.0	6.8
	2020년	31	5.5	1.5	5.1	2.9	3.0	5.9	3.6	3.5

※ 재개발․재건축 지역 및 10m 미만 소화전 연결관 등은 정비대상에서 제외한 연장임.

2). 2018년 정비목표(안)-시의회 예산 심의시 증․감 변경될 수 있음.

(단위 : km / 천원)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
정비목표	58	10.2	2.7	9.5	5.4	5.7	11.1	6.8	6.6
사 업 비	46,510,919	8,710,919	2,000000	7,600,000	4,300,000	4,500,000	8,800,000	5,400,000	5,200,000

○ 우선순위 선정 기준

- 1순위 : 민원발생(녹물출수 등) 및 누수 발생구간

- 2순위 : 서울형 도시재생사업 선정지역내(위치도 별첨) 노후관

- 3순위 : 세척갱생 경과년도가 오래된 구간

○ 사업계획서 작성방법 및 단위사업카드 작성 : “별첨”

- 노후 상수도관 현황 및 연차별 정비계획 제출 요청(누수방지과-6670, 2017.7.13.)호와 관련하여 사업소에서 제출한 계획서에 2018년 정비대상 표기할 것(2019년, 2020년은 상기 1). 사업소별 정비계획 연장과 일치)

나. 사업계획 심사일정

구 분	12.13 (수)	12.14 (목)	12.15 (금)	12.18 (월)	12.19 (화)	12.20 (수)	12.21 (목)	12.22 (금)
	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00
사업소	서부	북부	강서	강동	강남	동부	중부	남부

※ 단위사업카드는 심사당일 제출

붙 임 : 1. 2018년 단위사업계획 도면 작성방법  1부.

2. 2018년 배급수관 정비사업 추진계획서 1부.

3. 2018년 배급수관 정비사업 단위사업 카드 1부.

4. 서울형 도심재생사업 선정지역 1부.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수급수,상수시설
주무관	이동욱		누수방지과장	유승효		시설안전부장	11/29 강신재
협조자
시행	누수방지과-11199	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동) 시설안전부	/
전화	3146-1522	/전송	3146-1529	/		/	대시민공개