문서번호	시설관리과-33442
결재일자	2017.11.29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관	시설관리팀장	시설관리과장	동부수도사업소장
윤혜정	박종일	최명익	11/29 이구석
협 조

준공기한 연기보고

(제기동 1152-10~142-12외 4개소 배급수관 정비공사)

2017. 11.

동부수도사업소장

제기동 1152-10~142-12외 4개소 배급수관 정비공사

준공기한 연기보고

우리사업소에서 시행중인 「제기동 1152-10~142-12외 4개소 배급수관 정비공사」와 관련하여 서울시설공단으로부터 준공기한 연기 요청에 대한 실정보고가 접수되어 검토한 사항을 보고 드림.

1		공 사 현 황

▢ 관련근거 : 시설관리공단 공사감독2처-14653(2017.11.29.)

▢ 공 사 명 : 제기동 1152-10~142-12외 4개소 배급수관 정비공사

▢ 공사개요 : ********************

▢ 공사기간 : *************************

▢ 도 급 액 : ************

▢ 시 공 사 : ******************

▢ 감독기관 : 서울시설공단(공사감독2처)

2		보 고 내 용

▢ 시설관리공단 준공기한 연기 검토의견

가. 공정현황

◯ 공정율 : 98% (2017.11.29. 기준)

- 완료현황 : D=300㎜, L=2,255m

- 잔여공정 : D=150㎜, L=30m, 인입관 연결 시공 등

나. 시공사 준공기한 연기 요청 내용

◯ 준공기한 연기 사유

- 서울특별시 교통소통대책 자문회의 최종결과 통보 지연에 따른 착공지연

: 27일 (2017.05.11.~2017.06.07.)

‣ 당초 착공예정일 : 2017.05.11.

‣ 최종 자문결과 통보일 : 2017.06.07.

‣ 실 착공일 : 2017.06.08.

◯ 준공기한 연기 요청일(17일)

- 당초 : 2017.05.11. ~ 2017.12.03.

- 변경 : 2017.05.11. ~ 2017.12.20.

다. 시설관리공단 검토의견

: 시공사에서 제출한 준공기한 연기요청 검토결과 준공기한 연기가 필요함

◯ 6.7일 서울특별시 교통운영과로부터 교통소통대책 자문회의 최종결과 통보에 따라 6.8일 관할경찰서에 도로공사 신고 후 당초 계획보다 지연 착공하였으며 시공사의 귀책사유 없이 공정이 지연된바 준공기한을 연기하여 잔여공정 시행하는 것이 타당하다고 사료됨.

◯ 잔여구간의 연장과 현장여건을 검토한바 시공사가 요청한 준공기한 연기일수(17일)가 적정하다고 판단됨.

◯ 준공기한 연기 기간

- 당초 : 2017.05.11. ~ 2017.12.03.

- 변경 : 2017.05.11. ~ 2017.12.20.

3		조 치 계 획

▢ 본 공사는 2017.05.04일 계약 및 착공하였으나 시공사의 귀책사유 없이 공사시행 전 유관기관 협의 지연으로 인하여 공정이 지연되어 잔여공정 시행 및 설계변경을 위한 절대공기가 부족한 실정임.

▢ 상기와 같은 사항으로 본 공사의 준공기한을 아래와 같이 연기하여 공사시행에 만전을 기하고자 합니다.

◯ 당초 준공기한 : 2017.12.03.

◯ 변경 준공기한 : 2017.12.20.

◯ 연기사유 귀책소재 : 동부수도사업소

◯ 지체상금 부과여부 : 미부과

붙 임 : 1. 실정보고서(서울시설공단) 1부.

2. 공사 준공기한 연기원(시공사) 1부.  끝.