의원 요구 자료 제출

시 행	하천관리과-18508	(		)
접 수		(		)
결재일자	2017.11.29.
공개여부	대시민공개
수 신 자	수신자참조
수신자	서울특별시의회의장(의 사 담 당 관),서울특별시의회의장(기획경제수석전문위원),기획담당관,물순환정책과장

전문관	치수설비팀장	하천관리과장	물순환안전국장		결재
김재웅	백성현	손경철	11/29 권기욱
협 조

제 목	의원 요구자료 제출(요구번호 1723번, 맹진영의원 - 기획경제위원회)

의원님께서 요구하신 자료를 붙임과 같이 제출합니다.

따로붙임 : 시의원 요구자료 1부.  끝.

맹진영의원(기획경제위원회, 더불어민주당, 동대문구)

(요구번호 1723)

1. 동대문구 투자사업 관련

○ 2014년

17) 신이문 빗물펌프장 시설용량 증대(동대문구 이문동 57-3)

○ 2015년

35) 신이문 빗물펌프장 시설용량 증대(동대문구 이문동 57-3)

□ 의원님께서 요구하신 신이문 빗물펌프장 시설용량 증대사업 현황자료를

아래와 같이 제출합니다.

1)  사업목적

○  최근 기존 강우량 및 수방시설물 설계빈도를 초과하는 기상이변이 수시로 발생하고 있으며, 고밀도 도시화로 인해 피해규모가 급증하고 있음.

○  신이문 빗물펌프장의 수방능력을 서울시 방재성능목표기준인 30년 빈도로 증설하여 동대문구 이문동 일대 침수피해를 예방하고 시민의 생명과 재산을 보호.

2)  사업개요

○ 위    치 : 동대문구 이문동 57-3

○ 규    모 : 펌프장 증설 375㎥/분

- 배수펌프 설치 : 400hp×3대, 250hp×1대

- 토출관로 설치 : Ø1,500×1, L=21m

○ 공사기간 : 2013. 1. ~ 2015. 6.

○ 총사업비 : 4,226백만원

○ 시공사 / 감리사 : 동도건설 외 1 / 서울시시설관리공단

3) 사업 추진경위

○ 2007. 06. : 기상이변 대비 수방시설 능력향상 타당성 조사

○ 2010. 12. : 풍수해대책 종합결과보고(시장방침 477호)

○ 2011. 03 ~ 2012. 12 : 기본 및 실시설계용역 시행

○  2013. 01. : 공사 착공

○ 2014. 01. : 기존구조물 철거

○ 2014. 06. : 토목구조물 및 펌프 설치

○ 2015. 06. : 공사 준공

4) 예산 집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	2013년	2014년	2015년
사업비	4,226	437	2,027	1,762

붙임 : 1) 준공사진 1부.  끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (하천관리과)	담당사무관	백 성 현
	☎2133-3878	담당자	김 재 웅
	작 성 일 : 2017. 11