투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신자	관리과장
(경유)
제 목	준공기한 연기 요청 (홍제천 및 지천관로 보수공사)

1. 우리센터에서 시행하고 있는“홍제천 및 지천관로 보수공사”에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 홍제천 및 지천관로 보수공사

나. 공사기간 : 2017. 10. 27 ~ 2017. 12. 23

다. 도 급 자 : 산양공영㈜ 대표 김혁

라. 연기사유 : 차집관로 비굴착 전체보수 입찰방법 변경 및 계약심의위원                                회 심의 등 절차이행에 따른 발주 지연으로 절대 공기 부족

마. 준공기한 연기요청 현황

- 당초 : 2017. 12. 23

- 변경 : 2018. 06. 30

첨부  : 준공기한 연기요청 의뢰서 1부.   끝.

								시설보수과장
시설팀장							김재봉				시설보수과장					11/29 김일운
협조자
시행			시설보수과-4356										(						)		접수												(						)
우	10542					경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 (현천동)																/
전화		02-300-8590							/전송			02-300-8587					/														/	대시민공개