구민이 주인되는 희망강북!
		강북구
수신자	내부결재
(경유)
제 목	강북보훈회관 신축공사 1차 제1회 설계변경 시행

우리구에서 추진중인 강북보훈회관 신축공사와 관련하여 아래와 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

가. 공사현황

1) 사 업 명 : 강북보훈회관 신축공사

2) 위    치 : 강북구 미아동 198-55번지

3) 공사기간 : 2017.01.20. ~ 2018. 04.14

- 1차 공사기간 : 2017.01.20. ~ 2017.12.15.

4) 도 급 비 : 총차 2,031,428,170원 (1차 1,447,546,000원)

5) 시 공 자 : ㈜한원건설그룹 대표이사 최재호

나. 총공사비 금액 : 67,405,830원 증액

구 분		변 경 전	변 경 후	증 · 감액
총 도급액		2,031,428,170	2,098,834,000	67,405,830
도급비	공급가액	1,846,752,884	1,908,030,911	61,278,027
	부가가치세	184,675,286	190,803,089	6,127,803
	계	2,031,428,170	2,098,834,000	67,405,830

다. 1차공사분 설계변경 및 차수변경금액 : -16,846,000원 감액

구 분		변 경 전	변 경 후	증 · 감액
총 도급액		1,447,546,000	1,430,700,000	-16,846,000
도급비	공급가액	1,315,950,910	1,300,636,365	-15,314,545
	부가가치세	131,595,090	130,063,635	-1,531,455
	계	1,447,546,000	1,430,700,000	-16,846,000

라. 설계변경 내용

- 제1회 실정보고 : 후면부 절토면 자연석 쌓기 보강

- 제2회 실정보고 : 풍화암 추가발생으로 인한 유압할암공법 반영

- 제3회 실정보고 : 지하층 층고 변경 및 오류·누락된 골조물량 반영

- 제4회 실정보고 : BF예비인증 반영을 위한 마감변경 등

마. 예산과목

- 보훈회관건립, 보훈회관건립, 강북구보훈회관건립, 시설비및부대비, 시설비

붙임  1. 변경설계서(총차, 1차공사분 차수조정) 각 1부.

2. 보고서 4부.

3. 원가계산 제비율 검증확인서 1부.  끝.

주무관							호은성				주무관					강대유					공공시설팀장					권종출					건축과장						박우성
도시관리국장							11/29 이동일
협조자				복지기획팀장							신동산					계약팀장							남정우					복지정책과장								황재경
재무과장							김영모
시행			건축과-16542										(						)		접수												(						)
우	01071					서울특별시 강북구 도봉로89길 13(수유동)																/			http://www.gangbuk.go.kr
전화		02-901-6905							/전송			02-901-6890					/	hosilver@seoul.go.kr													/	부분공개