의원 요구 자료 제출

시 행	토목부-21204
결재일자	2017.10.16.
공개여부	부분공개(5)
접수번호
접수일자
수 신 자	건설총괄부장

주무관		토목총괄과장	토목부장	시설국장		결재
박형재		이동훈	김영수	10/16 류훈
협 조
	주무관				박예은

제 목	행정사무감사 요구자료 제출(요구번호 137번, 유광상 의원, 도시안전건설위원회)

행정사무감사 요구자료를 따로붙임과 같이 제출코자 합니다.

따로붙임 : 행정사무감사 요구자료 1부.  끝.

유광상 의원(도시안전건설위원회, 더블어민주당)

137. 서부간선 지하도로 민간투자사업 관련

1) 현재 공사 진행 현황

2) 현재까지 공사 중단 횟수 및 사유(공사 중단 건별로)

3) 반대 주민들의 집단 민원 처리 결과

□ 서부간선 지하도로 민간투자사업 관련

1) 현재까지 공사 진행 현황

○ 공정률 : 전체 8.1%(1공구 10.7%, 2공구 4.7%)

구 분	1공구			2공구
	시점부	비상탈출구 (양평유수지)	공기정화시설(신도림동)	공기정화시설 (구로1동)	종점부
공사내용	개착구간 교통전환 단계별 공사중	횡갱굴착 (33m/51.5m)	수직구 88m완료 유도갱 굴착 (36m/166m)	수직구 88m완료 유도갱 굴착 (33m/65m)	가시설 설치 공사중

2) 현재까지 공사 중단 횟수 및 사유(공사 중단 건별로)

○ 중단 횟수 : 1회

○ 중단 사유 : 학교, 주택가 밀집지역내 지하차도 환기구 설치 반대

3) 반대 주민들의 집단 민원 처리 결과

○ 집단 민원

- ‘16. 8.18.(300명) : 환기구 설치반대(신도림동, 구로1동)

- ‘16. 8.26.(200명) : 환기구 설치반대 이전요구(구로1동)

- ‘16. 8.27.(250명) : 환기구 설치반대 이전요구(신도림동)

- ‘16.11.11.(200명) : 환기구 설치 백지화 요구(구로구)

○ 처리 결과

- 주민들의 요구를 적극 반영하여 6개월간 공사를 중단하고 관련 학회·전문가

등과 다양한 대안을 마련하여 최종 터널공기를 외부로 배출하지 않고 내부에서

정화하는 바이패스방식으로 환기계획을 변경설계 적용 하였음

- 주민대표 및 비대위 등에 설명회 및 면담 등을 통해 지역주민들에게 관련       내용을 설명하였으며

- 앞으로도 지역주민들과 주민협의체 및 TF팀을 구성․운영하여 적극 소통하고

정보 등을 공유해 나갈 계획임.

· ‘16.8~’17.1 : 수직구 공사중단

· ‘16.12       : 환기계획 변경방침(내부정화방식)

· ‘17.1       : 환기계획 변경 주민설명회

· ‘17.1.이후   : 주민대표 면담, 설명회 등 12회 추진

앞으로도 주민소통 지속 추진.  끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	도시기반시설본부 (토목부)	담당사무관	이 동 훈
	☎3708-2544	주무관	박 형 재
	작 성 일 : 2017. 10.

이곳에 본문을 입력하세요