의원 요구 자료 제출

시 행	교량안전과-19116
결재일자	2017.10.24.
공개여부	비공개(5)
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		교량기획팀장	교량안전과장	안전총괄관	안전총괄본부장	결재
이회진		오재영	한유석	이진용	10/24 김준기
협 조

제 목	시의원 요구자료 제출(요구번호 1,500번, 주찬식 의원, 도시안전건설위원회)

따로붙임 :      시의원 요구자료 1부.  끝.

주찬식 의원(도시안전건설위원회, 자유한국당)

1500번. 2017년도 진행 중인 도로시설물 보수․보강공사 중 다음 공사에

대한 부진공정(계획대비 공정율 80%이하) 상세사유 (2017. 9.30 기준)

및 만회대책

[한강대교 외 2개소 우물통 보수보강공사, 북악스카이웨이 1교

개축공사, 탄천1교 보수공사, 모래내고가 보수공사, 성산대교

성능개선공사, 도림고가 보수공사, 구로1교 보수공사, 행주

I/C 보수공사]

□ 2017년도 진행중인 보수·보강공사 부진공정 만회대책은 아래와 같습니다.

연번	공사명	총 예산액 (백만원)	공정율 (%)	부진사유	공정 만회대책	담당자 (연락처)
1	한강대교 외 4개소 우물통 보수보강공사 (장기계속)	총사업비 7,384 (‘17년 4,384)	0%	- 적격심사에서 탈락한 2순위 업체의 낙찰자 가처분 소송제기로 계약지연 ※‘17.10.17 판결, 서울시 승소	- 판결결과에 따라 3순위 업체와 계약 및 하천점용 허가 시행 - 동절기 공장제작분 조기 제작 후 2018년 1차년도 및 2차년도 공사 동시 시행	조현범 (2133-1979)
2	북악스카이웨이 1교 개축공사	4,329	30%	보상 및 철거민 이주지연에 따른 사업부지 미확보	- 12월초 이주완료 후 착공	정성민 2133-1969
3	탄천1교 보수공사	2,252	35%	- 건설폐기물 평삭재(무대) 적치장소 부족(서울시 공통 사항)으로 6~8월 반출 불가 하였으며 9월부터 폐기물 반출이 소규모 현장부터 재개됨 - 교면포장이 전체 공정의 75% 차지하고 있어 폐기물 반출 지연에 따른 포장 공사 착공 지연	- ‘17.10.11일부터 포장 공사 시행중 · 10월 말 계획공정 65% · 11월 말 계획공정 95% · 12월 초 준공 예정	송준섭 (2133-1958)
4	모래내고가 보수공사	1,726	20%	실시설계용역 시일소요 (기간:‘17.2.28~5.12, 3개월) 공사 계약심사 시일소요 (기간:‘17.5.8~7.3, 2개월)	현재 공사 중으로 12월말준공예정	배상현 2133-1970
5	성산대교 성능개선공사 (장기계속)	총사업비 112,800 (‘17년 15,445 이월금액 포함)	9%	수방대책기간 하천공사 일시중단 및 망원수영장 폐장(8.30.) 이후 공사 시행에 따른 지연 강재가격 상승에 따른 납품업체 계약금액 조정 요구 등에 따른 가설교량 작업 지연	- 수방기간 이후(망원 수영장 폐장) 변경 공정표 작성 등 공정 만회대책을 수립 하였 으며 - 강재 납품업체 분할 납품촉구 및 계약금액 조정요건 총족시 반영 예정	조현범 (2133-1979)
6	도림고가 보수공사 (남부도로사업소)	1,352	30%	- ‘17.3월 정밀안전진단 결과 캔틸레버 내하력 부족으로 보수, 보강 실시설계용역 시행 - 보수공사 추진사항 · ‘17. 6 계약심사 · ‘17. 7 발주 · ‘17. 8.16 착공	- 캔팅레버 보강부 강재 가설벤트 기초 설치 및 가설벤트 제작 중 - P16 단면확대 및 받침교체, 단면보수 진행 중 P4~5 받침교체부 가설벤트 기초설치 등 공사 시행 중 · 10월 말 계획공정 70% · 11월 말 준공예정	고흥일 (3284-5465)
7	구로1교 보수공사 (강서도로사업소)	640	35%	- ‘15.12월 내진성능 평가 요령이 개정됨에 따라 내진성능 재평가 및 실시설계용역 시행 (‘17.9월 용역 준공)	- ‘17.10 계약심사 및 발주 - 주요공종 · 전단키 설치 2개소 · 면진받침 69개소 - ‘17.12월 준공 예정	김승진 (2657-7975)
8	행주I/C, 보수공사 (강서도로사업소)	710	35%	- ‘15.12월 내진성능 평가 요령이 개정됨에 따라 내진성능 재평가 및 실시설계용역 시행 (‘17.9월 용역 준공)	- ‘17.10 계약심사 및 발주 - 주요공종 · 탄성받침 72개소 - ‘17.12월 준공 예정	유태용 (2657-7971)

작성자	소 속	직 위	성 명
	교량안전과	담당사무관	오 재 영
	☎2133-1946	담 당	이 회 진
	작 성 일	2017.10.

이곳에 본문을 입력하세요