투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	식물표본전시관 전시연출용역' 설계변경 시행

1. 조경과-1881(2017.4.7.)호와 관련입니다.

2.「식물표본전시관 전시연출용역」추진과 관련 아래와 같이 설계변경 시행하고자 합니다.

가. 건    명 : 서울대공원 식물표본전시관 전시연출 용역

나. 내    용 : 제1ㆍ2표본전시실 및 북카페 내 전시장치물 및 설명패널 제작ㆍ설치

다. 기    간 : 2017. 4. 13 ~ 2017. 11. 30

라. 계약금액 : 86,000천원

마. 계 약 자 : ㈜인아웃에스씨 대표 이정수

바. 변경내역 : 과업범위 변경

구분		당 초	변 경	비 고
과업 범위	공간적 범위	○ 식물표본전시관 1층 제1·2표본전시실 및 북카페(512㎡)	○ 식물표본전시관 1층 제1표본전시실 및 북카페(208㎡)
	내용적 범위	○ 제1,2표본전시실 내 진열장 및 설명패널 제작ㆍ설치 ○ 북카페 내 가구 제작ㆍ설치	○ 제1표본전시실 벽체마감공사, 진열장 및 설명판 제작ㆍ설치 ○ 북카페 일부 벽체마감공사 및 가구 제작ㆍ설치

사. 예산과목 : 서울대공원 총무과, 공원이용시민 만족도 향상, 동물사관리기능및

야생동물종보전, 식물원및동물사조경관리, 시설비및부대비, 시설비

붙임 : 1. 설계변경 사유서ㆍ변경설계서 각 1부.

2. 방침서 1부(별첨).  끝.

★주무관							강명희				주무관					김효준					조경과장					11/29 강인호
협조자				총무과장							이행용
시행			조경과-6754										(						)		접수												(						)
우	13829					경기도 과천시 대공원광장로 102																/			http://grandpark.seoul.go.kr/
전화		02-500-7562							/전송			02-500-7993					/	gangmaeng@seoul.go.kr													/	부분공개(7)