투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	용역 준공기한 연기요청(예장동 유스호스텔 앞 긴급지반보강 및 하수관개량 실시설계)

우리부에서 시행 중인『예장동 유스호스텔 앞 긴급지반보강 및 하수관개량 실시설계』에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용 역 명 : 예장동 유스호스텔 앞 긴급지반보강 및 하수관개량 실시설계

2. 용 역 사 : (주)다산이엔지

3. 변경계약 내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
용역금액	64,000,000	64,000,000	변경없음
용역기간	'17.10.31.~'17.11.30.	'17.10.30.~'17.12.22.	증)22일

5. 예산과목 : 물순환안전국 하천관리과(재난관리기금), 수자원, 치수및하천관리, 치수사업, 재난예방, 시설비및부대비, 시설비

6. 준공기한 연기 귀책소재 및 연기사유

- 연기에 따른 귀책소재 : 서울특별시

- 지체상금 부과여부 : 미부과

- 연기사유 : 본 용역은 지반침하로 인해 긴급시행하여 설계진행중이나

지장물(하수관)의 위치가 도면과 상이하여 정확한 현장조사 및 설계가 어려움에 따라 설계와 시공을 병행하는 Fast-Track방식을 적용하고자 준공기한 연기요청

붙임 :  1. 준공기한 연기 방침서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부(따로붙임).  끝.

	토목부장
주무관	이상욱B		토목설계과장	여용석		토목부장	11/29 김영수
협조자
시행	토목부-24963	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 12층 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2589	/전송	02-3708-2599	/	bestwook84@seoul.go.kr	/	대시민공개