문서번호	도로포장연구센터-3600
결재일자	2017.11.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로포장연구센터장	품질시험소장
이창민		백종은	11/29 代김석태
협 조
	주무관			윤진성

2018년도

「도로동공 확인을 위한 천공 및 영상촬영」용역 추진계획

2017. 11.

서울특별시품질시험소

(도로포장연구센타)

2018년도

「도로동공 확인을 위한 천공 및 영상촬영」용역 추진계획

서울시도에서 공동에 의한 사고를 예방하기 위한 동공탐사의 일부인 천공 및 영상촬영의 용역을 수행하여, 탐사의 효율성 및 부족한 인력을 확보하여 작업의 안전성을 높이고자 함

Ⅰ		추진배경 및 필요성

□ 추진근거

○ 동공탐사 장비성능 및 분석능력 향상 방안

【도로포장연구센터-1800, 2016.08.26.】

□ 용역의 필요성

○ 서울특별시도의 도로 동공에 의한 사고를 예방하기 위해 2014년부터 동공탐사를 수행하였으며, 2015년에는 도로동공탐사장비를 도입하여, 서울시에서 자체적으로 동공탐사를 수행함

○ 동공탐사의 일환으로 차량형 GPR 장비를 이용하여 획득한 분석동공의 동공유무 및 규모를 규명하기 위하여, 분석 지점에 천공 및 영상촬영 수행함

○ 천공 및 영상촬영은 작업자의 안전 및 유관기관 협조, 분석동공지점의 정확한 확인을 위한 핸드형 GPR 조사, 작업 후 주변정리 등 다양한 작업 및 다수의 인력이 필요함

○ 이에, 부족한 인력 및 작업의 안전성을 확보하기 위하여 용역을 수행하고자 함

Ⅱ		용 역 개 요

□ 과업명 : 「도로동공 확인을 위한 천공 및 영상촬영」

□ 과업목적

○ 서울시에서 지정하는 분석동공 위치에 대하여 천공 및 영상촬영 등을 실시하여 동공의 존재유무 및 규모를 정확하게 파악하는 것을 목적으로 함

□ 위    치 : 발주기관이 지정하는 구간

□ 계획수량 : 천공 및 영상촬영(100개소), 핸드형GPR(150개소)

○ 천공 및 영상촬영(km당 0.4개), 핸드형GPR(km당 0.6개)

○ 핸드형GPR에서 제척되는 분석동공은 천공 및 영상촬영 불필요

○ 분석동공 수량에 따라 계획수량이 변경되었을 경우 과업내용서 “과업개요, 10. 과업내용 변경 및 계약금액 조정” 라목에 따라 계획수량 및 금액 조정

□ 과업기간 : 계약일로부터 300일

□ 소요예산 : ****************

□ 과업범위

○ 서울시에서 지정하는 분석동공 위치에 대한 지하시설물의 정보를 수집하고 유관기관과 협의

○ 분석동공 위치에서 정확한 천공 위치를 확인하기 위한 핸드형 GPR 수행

○ 핸드형 GPR 수행시 작업주변 환경 조사(맨홀, 도로상태 등)

○ 천공 후 주변정리 및 폐공 수행

○ 작업자의 안전을 위한 안전유도 시설 확보 및 안전장비 착용

○ 발견된 동공에 한하여, 동공 발생원인 및 동공위치, 규모 등에 관한 보고서 및 관리대장 작성

Ⅲ		과업 추진계획

□ 용역발주 : ‘18. 2월

□ 용역계약 : ‘18. 2월

□ 용역수행 : ‘18. 2~12월(계약일로부터 300일)

붙임 : 1. 과업내용서 1부.

2. 산출내역서 1부. 끝.