문서번호	행정지원과-27395
결재일자	2017.11.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장		강남수도사업소장
백판종	김종진	김인웅		11/30 代김인웅
협 조

쾌적하고 안전한 청사관리를 위한 청사 행정지원과(민원실) 개조공사 계획

□명품 아리수 명품 강남수도□

2017년 11월

강남수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

청사 행정지원과(민원실) 개조공사 계획

청사 민원실의 노후된 시설물 철거 및 수리와 사무가구 재배치로 민원응대 서비스 향상 및 직원의 근무환경을 개선코자 함

1  추진배경 및 목적

❍ 청사 행정지원과 민원실 시설물의 노후화 및 전화민원 상담 직원의 좌석배치가 부적절하게 배치되어 있음

❍ 이에따라 사무실 근무환경 개선 및 효율적인 민원전화 상담 응대를 위해 개조공사가 절실히 요구 됨

❍ 사무실 개조공사를 시행하여 쾌적하며 민원전화 응대업무를 향상시킬 수 있는 효율적인 공간조성으로 아름답고 안전한 청사 운영관리의 목적을 달성하고자 함

2  현    황

❍ 행정지원과(민원실) 사무실

위 치	면적(㎡)	좌석수	좌석구조 형태 (전화민원상담 좌석)	비 고
본관 지하1층	128	10석	곡선일자형 데스크	2004년 사무실 개보수

❍ 현황사진

행정지원과(민원실)	행정지원과(민원실)

3  공사개요

❍ 공사명 : 청사 행정지원과(민원실) 개조공사

구 분	실 명	공사부문	면적(수량)	비 고
본 관	행정지원과	가설공사	비계설치 3개
		철거공사	금속틀 1개 목재민원대 1개	금속틀, 목재민원대 등
		목공사	민원대 1개
		기타공사	천정해체설치 데코타일설치 민원대안내판설치

❍ 위치 및 규모(주요공정)

❍ 공사기간 : 2017. 12. 15.(금) ~12. 17(일)

5 예산현황

소요예산 : 9,954천원

❍ 재료비 : 3,258천원

❍ 인건비 : 5,360천원

❍ 기  타 : 1,336천원

계약방법 : 수의1인견적(전자시담)

-- ❍ 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제30조 제1항 제2호

예산과목

❍ 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비, 시설장비유지비

6  추진일정

❍ 내부방침 : 2017년 11월 30일

❍ 설계․발주 : 2017년 11월 30일

❍ 계    약 : 2017년 12월 1일

❍ 준    공 : 2017년 12월 17일

7

행정사항

❍ 설계전 관련업체 자문 등 사전준비 철저

❍ 공사 시행시 예산낭비 사례가 없도록 유념하여 설계 및 시공

❍ 하자 및 사고가 발생하지 않도록 감독 규칙 준수 철저