시 행	도시철도설비부-14360
시행일자
수 신 자	내부결재

결재	주무관	시설전기과장	도시철도설비부장
	박지영	서태창	11/30 구자훈

설계변경 자문회의(소위원회) 자문결과

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			유신감(921)17-789호				요청부서		921공구감리단		자문일자		2017.11.29.
공 사 명			서울지하철9호선3단계 921공구 건설공사
공사개요			공사규모				- 위 치 : 올림픽공원 남4문~올림픽공원역(한국체대입구) - 규 모 : 총연장(L=2,361m) • 정거장:2개소, 본선환기구:4개소, 터널:2,361m, 본선집수정:2개소 • 변압기용량 (935정거장:5,000kva,935정거장:4,850kva)
			공사기간				2010. 09. 16 ～ 2018. 12. 31.
			감 리 사				(주)유신외 1개사
			설 계 사				(주)신우디엔시
			시 공 사				(주)포스코건설외 1개사
자문요청사유							5,000만원 이상 변경사항
설계변경사항(요약) 9호선3단계 921공구 건설공사 중 935정거장(대합실),936정거장(캐노피)고품격 특성화정거장으로 본부장 방침에 따라설계변경 함, 대합실 등기구는 특화등기구로 변경설치하고 작동은 외부조도와 색온도를 연동해서 연출하게 설계하고,캐노피는 특화에 맞게 설계 디자인 반영함
원설계자 의견
자문결과		조건부가결			붙임 자문위원 지적사항 보완 조건
자문결과 조치					· 자문위원 지적사항을 보완하여 설계에 반영조치
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
위 원 장 : 시설전기과장 서태창, 간사 : 박지영 내부위원 : 문학준, 황영필 외부위원 : 중앙정밀연구소 이동옥, 대한라이팅 박상동, 동산엔지니어링 이재석