＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	강서수도사업소
수신자	행정지원과장
(경유)
제 목	청사 비상발전기 조달구매 납품기한 연기 요청

1. 시설관리과-24432(`17.11.29.)호와 관련입니다.

2. 계약번호 00167052200호로 우리 사업소에서 시행중인 『청사 비상발전기 조달구매』에 대하여 납품기한을 아래와 같이 연기요청 합니다.

가. 구매건명 : 청사 비상발전기 조달구매

나. 구매수량 : 비상발전기 1대

다. 계약금액 : *******************************[계약금액 변동없음]

라. 납품기한

- 당초 : 2017. 12. 02.

- 변경 : 2017. 12. 09.

마. 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 건물, 시설비 및 부대비, 시설비

바. 연기사유 : 발전기실 내부 마감공사가 미완료로 발전기 설치 및 시운전이 불가능하여 납품기한 연기

사. 귀책사유 : 강서수도사업소

아. 지체상금부과 : 미부과

붙임 : 납품기한 연기 보고서 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	이무규		기전팀장	문용욱		시설관리과장	11/30 代김근용
협조자
시행	시설관리과-24521	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 (신정동)	/
전화	02-3146-4017	/전송	02-3146-4039	/	lmkyu@seoul.go.kr	/	부분공개(5)