문서번호	건축부-20651
결재일자	2017.11.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		의료시설과장		건축부장
김대식		김충범		11/30 김진용
협 조
	선도사업관리팀장				代권혁기

『창동역 고가하부 문화예술공방 조성공사』

공사발주 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
	문화융합경제과	공사기간 및 예산

2017. 11.

건축부장

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	□

『창동역 고가하부 문화예술공방 조성공사』

공사발주 시행계획

『창동역 고가하부 문화예술공방 조성공사』시행을 위한 공사입찰 및 낙찰자 결정 방법 등 공사 발주계획에 대하여 검토 보고 드림

1		사업개요

사 업 명 : 창동역 고가하부 문화예술공방 조성공사

공사개요

- 대지위치 : 도봉구 창동역 1번출구 앞 고가하부

- 대지면적 : 1,175㎡(폭 9.4m, 길이 125m)

- 사업규모 : 건축물 7개동 연면적 450㎡ 및 조경시설물

- 공사종별 : 신축

- 용    도 : 제2종근린생활시설(공방, 음악연주, 합주실 등)

사 업 비 : 1,200백만원(시설비)

설 계 자 : ㈜유토건축 종합건축사사무소 외2개사

설계기간 : ‘17. 6. 21 ~ ‘18. 1. 16

예정 공사기간 : ‘17. 12. ~ ‘18. 9. [착공일로부터 10개월]

※ 전기,기계,통신 분야는 설비부에서 별도 발주 추진

사업 의뢰부서 : 동북권사업단

위치도 및 조감도

2		추진경위

‘15. 12. ~ ’16. 12. : 문화예술공방 조성 기본계획 용역시행

‘16. 10.     : 기술용역타당성 심사(기본 및 실시설계용역)

‘17.  4. 11 : 고가하부 문화예술공방 조성사업 추진계획 수립

‘17.   6. 21 : 기본 및 실시 설계용역 계약 및 착수

‘17. 11. 29 : 계약심사 완료

3		예산현황

(단위 : 원)

구 분	계	2017년	2018년	비고
총사업비	1,200,000,000	1,200,000,000	0
시설비	1,200,000,000	1,200,000,000	0	공사비 10억 설계비 2억
감리비	0	0	0
시설부대비	0	0	0

4		공사 발주계획

********************************

*******************************************

**************************************

*********************************************

*******************

********

*****************************************************

***********************************************************

********

********

*****************************************************************************************************************************************************

***************

***********************************************************

5		공사 입찰계획

***************************************

********************************************

***********

*****************************************************************************

*************

************

****************************************************************

***********************************************************

****************************************************

************

**********************************************************************************

************

************************************************

********************************************

********************************************************************************************************

*****************************************************************************************

************

****************

********************************************************

*******************************************************************

****************************************

************

**********************************************************************************************

**********************

********************************************

*******************

******************************************

***************************************************************

*************************************************************************************************

6		행정사항

공사발주 의뢰 : 도기본 건축부 → 재무과

향후일정

- 2017. 12. : 공사 시행 및 계약 의뢰

- 2017. 12. : 입찰 및 낙찰자 결정

- 2017. 12. : 계약체결

- 2017. 12. : 공사 착수(10개월)

- 2018.   9. : 공사완료

- 2018.   9. : 시설물 인계인수

붙임 : 1. 계약심사 결과서 1부.

2. 예정공정표 1부.

3. 긴급공고 및 제한입찰 사유서 1부.  끝.