【별지 제4호서식】

물품제조 계약심사요청서(설계변경)

부분공개(5)

시 행	기전설비과-9135
시행일자
수 신 자	서 울 특 별 시 장(계약심사과장)
접 수
접수일자

주무관		기전설비과장	생산부장			결재
이상록		조성태	11/30 유성종
협 조

계약건명	‘암사1정수장 탈수설비 개량공사’ 관급자재(탈수기) 제작구매설치			요청기관	상수도사업본부 (생산부 기전설비과)
산출금액	금1,460,963,000원(금일십사억육천구십육만삼천원)
계약기간	2017.05.16.~12.12. (210일간)		계약업체			************
예정원가 작성자	․ 담당부서 : 상수도사업본부 생산부 기전설비과 ․ 작 성 자 : 이상록 (전화번호 : 3146-1335)
예산내역	세부 사업명	예산과목					예산잔액(천원)
	정수장시설 정비	자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비, 시설비					284,206
○ 계약내용 - 150kg·DS/m·hr이상 × 3m 의 고압벨트프레스 탈수기 6대 - W900mm이상 × 30mL 벨트컨베이어 1대 - 탈수기 현장제어반 1식 - 기존설비 철거 및 신규설비 설치 포함 ○ 변경계약내용 - 슬러지 자동조절장치 1식(슬러지 성상에 따라 약품투입비율 자동조정장치) ○ 계약금액 변경 - 당초 : 금1,420,811,000원 - 변경 : 금1,460,963,000원 [금40,152,000원(증)]
◦ 첨부서류 1. 산출기초조사서(변경) 1부 2. 견적서 2부 3. 방침서 및 관련문서 3부

	서울특별시상수도사업본부장

제조원가계산서
◦ 품 명 :	벨트프레스탈수기	◦ 수 량 :	6대
◦ 규 격 :	150kg·DS/m·hr이상 × 3m	◦ 제조기간 :	240일

붙임‘산출기초조사서’ 참조.  끝.