투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	설계변경 시행(2회,정산)-건설폐기물 운반 및 처리 용역(광화문 차도구간 정비공사)

우리사업소에서 시행중인 “건설폐기물 운반 및 처리 용역(광화문 차도구간 정비공사)” 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 건설폐기물 운반 및 처리용역(광화문광장 차도구간 정비공사)

나. 공사기간 : 2016. 10. 26. ~ 2017. 11. 30.

다. 도 급 자 : ㈜씨에스  대표 최상준

라. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분		당 초 금 액	변 경 금 액	증, 감
총 공 사 비		119,000,000	161,590,000	증)42,590,000
도급비	공 급 가 액	108,181,819	146,900,000	증)38,718,181
	부가 가치세	10,818,181	14,690,000	증)3,871,819
	계	119,000,000	161,590,000	증)42,590,000

마. 설계변경사유 : 본 공사 물량 증가에 따른 폐기물 처리 물량 증가

바. 준공기한 연기

- 당초 : 2017.11.30.

- 변경 : 2017.12.31.

- 사유 : 보수물량 증가에 따른 본공사 기간 증가 등

사. 예산과목 : 도로관리과, 도로시설물 관리, 도로 및 도로부속물 관리, 노후포장도로 정비공사, 시설비 및 부대비, 시설비

따로붙임  1. 설계변경 사유서. 1부.

2. 설계변경 내역서. 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
주무관	이화신		도로보수과장	김학동		북부도로사업소장	11/30 신응수
협조자
시행	도로보수과-11819	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913 (번동)	/
전화	944-5433	/전송	945-5072	/	hwas44@seoul.go.kr	/	대시민공개