투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 변경 요청(특수페인트)

1. 도로보수과-12015호(2017.11.13.)와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행하고 있는 『2017년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)』에 소요되는 관급자재(특수페인트)의 납품기한을 아래와 같이 변경요청 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 관급자재 구매(특수페인트-노면표시용)

※ 납품요구번호 : 12-17-1-17382-02

나. 납품기한

1) 당   초 : 2017. 12. 15

2) 변   경 : 2017. 12. 29

다. 구매내역 : 붙임참조

라. 변경사유 : 당초 납품기한을 조달청 계약기간인 2017년 12월 15일로 하였으나, 『2017년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)』 준공기한 연기에 따라 2017년 12월 29일로 변경하고자 함.

마. 예산과목

1) 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물 관리, 노면표시 도색 및 제거, 시설비【189,942,610원】

2) 도로관리과, 도로시설물 관리, 도로 및 도로시설물관리, 노후포장도로정비공사, 시설비

【34,265,100원】

3) 도로관리과, 도로시설물 관리, 도로굴착복구, 도로굴착복구공사, 시설비【34,230,770원】

4) 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리 강화, 교통사고 잦은곳 개선, 시설비【17,640,110원】

5) 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리 강화, 교통사망사고 줄이기 사업, 시설비【503,270원】

6) 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리 강화, 도로교통소통개선사업, 시설비【5,472,390원】

7) 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 버스서비스이용제고, 중앙버스전용차로흐름개선, 시설비【4,785,780원】

붙임  방침서 및 분할납품요구 및 통지(조달청)  1부.  끝.

	도로보수과장
주무관	박성근		도로보수과장	전결 11/30 김권일
협조자
시행	도로보수과-12663	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237 (마곡동67-1) 강서도로사업소	/
전화	02-2657-7942	/전송	02-2657-7960	/		/	대시민공개