＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	상수도사업본부
수신자	재무회계과장
(경유)
제 목	계약사항 변경(납품기한) 요청

1. 기전설비과-9040(2017.11.27.)호와 관련입니다.

2. 우리 부에서 추진중인 ‘강북정수센터 과산화수소 주입설비 제작구매설치’건의 계약기간을      변경하고자 하오니 아래와 같이 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 계 약 명 : 강북정수센터 과산화수소 주입설비 제작구매설치

나. 계약번호 : 20170601D2E00

다. 계약대상 : 주식회사 아큐스 (대표 : 이희헌)

라. 변경사항 : 계약기간 변경

1) 당초 : 2017.06.05. ~ 2017.12.05.

2) 변경 : 2017.06.05. ~ 2017.12.20. (증15일)

마. 변경사유 : 단수일정 지연에 따른 현장설치 지연

바. 귀책사유 : 우리 본부

붙임  1. 보고서 1부.

2. 합의서 1부.  끝.

	기전설비과장
주무관	이상록		기전설비과장	11/30 조성태
협조자
시행	기전설비과-9106	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1335	/전송	3146-1319	/	rock1975@seoul.go.kr	/	대시민공개