문서번호	설비부-20345
결재일자	2017.12.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	열빛총괄과장
성호준	12/01 유병기

『만리재로 보행환경개선 전기공사』

설계변경 소위원회 자문 요청

2017. 12.

도시기반시설본부

(설비부)

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호			요청부서	설비부		요청일		2017년 12월 일
공 사 명	만리재로 보행환경 개선 전기공사
공사개요	공사규모		가로등 159본(LED 100W), 교통신호 5개소
	공사기간		`16.12.27. ~ `17.12.08.(2차 `17.6.1 ~`17.12.08.)
	감 리 사		대영유비텍(교통신호)
	설 계 사		다산이엔지
	시 공 사		(합)고려공업기업사 대표 차대윤
자문 안건명			설계변경 요청금액의 적정성				요청금액		감)136,774,980원
자문요청사유			☑ 5,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ☑ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ☑ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ☑ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 - 유지관리부서(마포구청, 중구청, 용산구청) 요구사항 반영 ․ 등주 높이 9m→10m, 보행등 설치, 청파로 등 가로등 추가 교체 - 소규모 포장단가 서울시 원인자 기 거래단가 적용
원설계자 의견(요약) ○ 내용 : 없음
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 가로등주 9m 159 본 → 10m 166본 9m 2본, 8m 1본 - 가로등기구(LED100W) 159개 → 199개 - 보행등 : 0개 → 163개 - 기 초 : 169개 → 134개 - 보안등 : 0본 → 3본 -					▪ 공사비 증감 현황 - 총 차 당 초 : 860,828천원 변 경 : 724,054천원, 증 감 : 감)136,774천원 - 2차 당 초 : 767,678천원 변 경 : 630,904천원 증 감 : 감)136,774천원
별첨서류		1. 설계변경 심의자료 1부.

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	만리재로 보행환경 개선 전기공사
계약금액	860,828,980원	계 약 일	2016.12.15.	시 공 사	(합)고려공업기업사
공사기간	2010.10.05 ~ 2017.12.31	낙 찰 율	86.745%	설 계 자	다산이엔지
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사( )			감 리 자	대영유비텍(교통신호)
공사규모	가로등 159본(LED 100W), 교통신호 5개소			※ 작성자 : 성호준 (☎ 3708-8602)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증)/감)
변 경 개 요	주요변경 내용 참조		주요변경 내용 참조
공 사 비	860,828,980		724,054,000	감) 1,896,200천원
적 용 요 율	86.745%(낙찰률)		86.745%
설계변경요구자	☑ 발주처 ▢ 계약상대자
협의율 적용 근거	공사계약일반조건 제20조의 2항
설계변경 근거	방 침	⦁ 유지관리부서 요구사항 반영(설비부-1580, `17.2.1.)
설계변경 유형	① 사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ② 설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ④ 민원해결, 보수, 보강 ⑤ 문화재 및 지장물 이설 ⑥ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦ 제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	- 유지관리부서(마포구청, 중구청, 용산구청) 요구사항 반영 - 소규모 포장단가 서울시 원인자 기 거래단가 적용
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진

○ 공사비 증감현황

구 분	공 사 비 (원)						비 고
	총차	2차			2차 증(-)감	증(-)감
		가로등	신호등	계
직 접 공사비	573,268,832	205,565,752	268,906,761	474,472,513	-58,613,502	-58,613,502
	507,578,738	199,330,701	216,528,310	415,859,011
제경비	287,560,148	138,454,600	154,751,867	293,206,467	-79,761,780	-79,761,780
	221,592,262	111,026,299	104,018,690	213,444,687
도급액	860,828,980	344,020,352	423,658,628	767,678,980	-136,774,980	-136,774,980
	724,054,000	310,357,000	320,547,000	630,904,000

○ 세부변경내역

구 분	당 초				변 경				증,감 (천원)	비 고
	주요물량			금액 (천원)	주요물량			금액(천원)
1. 가로등 설비공사	가로등주	8m 1등용			가로등주	8m 1등용	1본	1,032	1,032
		9m1등용	121본	15,980		9m1등용	2본	264	-15,716
		10m,1등용				10m,1등용	166본	23,648	23,777
	보안등주	LED 50W			보안등주	LED50W	3본	353	353
	가로등 기구	LED 100W	159개	5,213		LED100W	199개	6,524	1,311
	통합폴암	1등용			통합폴암	1등용	22	10,300	10,300
		2등용				2등용	3	1,406	1,406
	보행등기구 (암대포함)	LED 50W				LED50W	163개	4,794	4,794
	가로등기초	9M	164개	20,640	기초	9M	127개	15,983	-4,657
	가로등제어반기초	기성품	7개	1,462	가로등제어반기초	기성품	7개	1,462
	가로등 분전반	보행안내사인 융합분전반	7면	1,148	가로등 분전반	보행안내사인 융합분전반	7면	1,148	1,148
	소형고압 블럭굴착배관	기계80%+인력20%,B=1.2M	3,725M	63,426	소형고압 블럭굴착배관	기계80%+인력20%,B=1.2M			-63,426
	소형고압 블럭굴착배관	기계80%+인력20%,B=0.5M			소형고압 블럭굴착배관	기계80%+인력20%,B=0.5M	414M	13,649	13,649
	소형고압 블록굴착배관(보도블럭걷기제외)	기계80%+인력20%,B=0.5M			소형고압 블록굴착배관(보도블럭걷기제외)	기계80%+인력20%,B=0.5M	3,484M	44,167	44,167
	아스팔트 횡단굴착 (야간)	기계80%+인력20%	458M	24,556	아스팔트 횡단굴착 (야간)	기계80%+인력20%	149M	7,989	-16,567
	아스팔트포장복구	A-2(20M이하)			아스팔트포장복구	A-2(20M이하)	66M	9,660	9,660
	FCV2열포설(가로등)	FCV 1C*6㎟	458M	1,772	FCV2열포설(가로등)	FCV 1C*6㎟	694M	2,686	914
	FCV4열포설(가로등)	FCV 1C*6㎟	3,672M	25,332	FCV4열포설(가로등)	FCV 1C*6㎟	5,202M	35,873	10,541
	FCV4열포설(가로등)	FCV 1C*10㎟	253M	2,178	FCV4열포설(가로등)	FCV 1C*10㎟	118M	1,015	-1,163
	FCV2열포설(가로등)	FCV 1C*16㎟	150M	850	FCV2열포설(가로등)	FCV 1C*16㎟	70M	396	-454
	FCV2열포설(가로등)	FCV 1C*25㎟	250M	1,863	FCV2열포설(가로등)	FCV 1C*25㎟	115M	857	-1,006
	FGV	6㎟	4,383M	8,805	FGV	6㎟	5,392M	10,833	2,028
	FGV	10㎟			FGV	10㎟	187M	482	482
	PE배관(지중)	36C (야간)	3,304M	33,106	CD-P	36C (야간)	97M	972	-32,134
	PE배관(지중)	36C (주간)			CD-P	36C (주간)	2,058M	20,675	20,675
	PE배관(지중)	42C (야간)	421M	4,832	CD-P	42C (야간)			-4,823
	PE배관(지중)	42C (주간)			CD-P	42C (주간)	201M	2,329	2,329
	전선관배관	아연도 36MM			전선관배관	아연도 36MM	75M	1,387	1,387
	전선관배관철거	아연도 36MM			전선관배관철거	아연도 36MM	75M	353	353
	전선관배관	아연도 54MM			전선관배관	아연도 54MM	9M	160	160
	전선관배관	100MM	247M	13,316	전선관배관	100MM			-13,316
	풀박스 (SUS)	200*200*200			풀박스 (SUS)	200*200* 200	3개	369	369
	보안등점멸기	GPS식			보안등점멸기	GPS식	3개	232	232
	가로등용 ELB	누전차단기내장,방수	159개	10,984	가로등용 ELB	누전차단기내장,방수	210개	14,507	3,523
	가로등기초제작	현장타설			가로등기초제작	현장타설	1개소	186	186
	접지공사	φ14*1000			접지공사	φ14*1000	1개소	50	50

구 분	당 초						변 경					증,감 (천원)	비 고
	주요물량					금액 (천원)	주요물량				금액(천원)
2.가로등 철거공사	철거	가로등		126본		13,601	철거	가로등	160본		15,623	2,022	한겨레신문사건너편4본,신한은행뒷길7본추가철거
	철거	분전반		7면		573	철거	분전반	7면		573
소 계			1차			59,830					59,830
			2차			205,566					199,330	-6,236
			계			265,396					259,160	-6,236
3.신호등공사	제어기 개선형 차광막		STEEL 63*50 *16cm		5	1,375 ,810	제어기 개선형 차광막		STEEL 63*50 *16cm	0	0	-1,375,810
	차량신호등 신설		관급 1면 4색		1	5,117 ,846	차량신호등 신설		관급 1면 4색	2	4,194,956	-922,890
			관급 1면 3색		13				관급 1면 3색	10
	보행신호등 설치		관급		25	1,603 ,500	보행신호등 설치		관급	18	1,154,520	-448,980
	잔여시간 표시기 설치		관급 숫자형		23	1,475 ,220	잔여시간 표시기 설치		관급 숫자형	14	897,960	-577,260
	시각장애인용음향신호기		관급		25	19,732,525	시각장애인용음향신호기		관급	20	15,786,020	-3,946,505
	음향신호기 압버턴		관급		25	6,810,150	음향신호기 압버턴		관급	20	5,448,120	-1,362,030
	교통신호등 지주 신설		250		20	3,868,520	교통신호등 지주 신설		250	9	1,740,834	-2,127,686
			125		4	698,480			125	0	0	-698,480
	지주부착대 설치		관급 9m		11	1,536 ,656	지주부착대 설치		관급 9m	7	977,872	-558,784
			관급 7m		11	1,418 ,461			관급 7m	12	1,547,412	128,951
	지주기초 앙카		250		20	21,574, 980	지주기초 앙카		250	12	12,944,988	-8,629 ,992
			125		3	1,107,237			125	12	4,428,948	3,321,711
			125 (0.8*0.6*0.8)		1	306,062			125 (0.8*0.6*0.8)	0	0	-306,062
	기초앙카 제거 (T=30cm)		250		14	873.348	기초앙카 제거		250	11	686,202	-187,146
			200		4	185.988			200	4	464,970	278,982
	기초앙카 제거 (T=30cm)		125		4	88,164	기초앙카 제거 (T=30cm		125	9	198,369	110,205
	신호케이블 (F-CVV, 2.5SQ/5C)		지중 1선		536	3,740,208	신호케이블 (F-CVV, 2.5SQ/5C		지중 1선	0	0	-3,740,208
			지중 2선		381	4,909,947			지중 2선	0	0	-4.909,947
			지중 3선		114	2,706,624			지중 3선	0	0	-2,706,624
			지중 4선		94	2,322,270			지중 4선	0	0	-2,322,270
			지중 5선		48	1,469,472			지중 5선	0	0	-1,469,472
			지중 6선		35	1,278,340			지중 6선	0	0	-1,278,340
			지중 7선		14	594,062			지중 7선	0	0	-594,062
	전원선 (F-CV 6SQ/2C)		지중 1선		250	895,250	전원선 (F-CV 6SQ/2C)		지중 1선	40	143,240	-752,010
	전송선 (CPEV 0.65mm *5P)		지중 1선		250	715,250	전송선 (CPEV 0.65mm *5P)		지중 1선	0	0	-715,250
	전선관 배관(야간)		PE 54 1열		234	4,782,492	전선관 배관(야간)		PE 54 1열	122	2,493,436	-2,289,056
			PE 100 1열		43
						1,247,387			PE 100 1열	168	4,873,512	3,626,125
			ST 100 2열		270	26,718,390			ST 100 2열	232	22,958,024	-3,760,366
	아스팔트 횡단굴착		기계80%+인력20% B=1.2m		280	15,012, 480	아스팔트 횡단굴착		기계80%+인력20% B=1.2m	232	12,438,912	-2,573,568
	소형고압 블록굴착 배관		기계80%+인력20% B=1.2m		283	4,818, 641	소형고압 블록굴착 배관		기계80%+인력20% B=1.2m	290	4,937,830	119,189
3.신호등공사	관구마개 설치		Φ100		47	639,200	관구마개 설치		Φ100	0	0	-639,200
			Φ50		25	413,450			Φ50	0	0	-413,450
	맨홀(800mm) 설치 블록포장		소형고압블럭 T=6~8cm		16	229,264	맨홀(800mm) 설치 블록포장		소형고압블럭 T=6~8cm	18	257,922	28,658
	맨홀(사각뚜껑포함)		800		16	8,112,160	맨홀(사각뚜껑포함)		800	18	9,126,180	1,014,020
	소규모포장복구				280	98,406,560	소규모포장복구			0	0	-98,406,560
	교통신호감시 설비 이설				1	8,492,685	교통신호감시 설비 이설			0	0	-8,492,685
	차량신호등 이설		LED 1면2,3,4색(경보등 포함		0	0	차량신호등 이설		LED 1면2,3,4색(경보등 포함	8	3,112,208	3,112,208
	보행,잔여시간,보조등 이설		LED 1면2,3색(숫자,도형)		0	0	보행,잔여시간,보조등 이설		LED 1면2,3색(숫자,도형)	10	1,189,910	1,189,910
	차량신호등 철거		LED 1면2,3,4색(경보등 포함		0	0	차량신호등 철거		LED 1면2,3,4색(경보등 포함	11	1,188,682	1,188,682
	보행,잔여시간,보조등 철거		LED 1면2,3색(숫자,도형)		0	0	보행,잔여시간,보조등 철거		LED 1면2,3색(숫자,도형)	2	66,106	66,106
	시각장애인용 음향신호기 이설		본체(공통)		0	0	시각장애인용 음향신호기 이설		본체(공통)	6	578,310	578,310
	음향신호기 압버턴 이설		압버턴(공통)		0	0	음향신호기 압버턴 이설		압버턴(공통)	6	135,624	135,624
	교통신호등지주 신설		300 *8 관급		0	0	교통신호등지주 신설		300 *8 관급	7	1,732,444	1,732,444
			125 *4 사급		0	0			125 *4 사급	11	5,985,595	5,985,595
			200 *8.5 사급		0	0			200 *8.5 사급	3	3,960,948	3,960,948
	디자인지주부착대		7m		0	0	디자인지주부착대		7m	3	2,125,881	2,125,881
	지주기초 및앙카 신설		300*1.8		0	0	지주기초 및앙카 신설		300*1.8	8	8,718,864	8,718,864
			200*1.5		0	0			200*1.5	5	3,136,250	3,136,250
	교통신호등 지주 이설		250		0	0	교통신호등 지주 이설		250	1	350,639	350,639
			200		0	0			200	2	701,278	701,278
	지주부착대 이설		7m		0	0	지주부착대 이설		7m	3	701,274	701,274
	교통신호등 지주 철거		250		0	0	교통신호등 지주 철거		250	6	372,210	372,210
			200		0	0			200	8	583,336	583,336
			150		0	0			150	1	82,438	82,438
			125		0	0			125	5	409,645	409,645
	지주부착대철거		9m		0	0	지주부착대철거		9m	14	887,642	887,642
			7m		0	0			7m	2	122,286	122,286
			5m		0	0			5m	1	62,226	62,226
	디자인지주차량용 보호금구				0	0	디자인지주차량용 보호금구			38	3,296,310	3,296,310
	디자인지주보행용보호금구				0	0	디자인지주보행용보호금구			18	1,561,410	1,561,410
	신호케이블 (F-CVV, 1.5SQ/5C)		지중 1선		0	0	신호케이블 (F-CVV, 1.5SQ/5C)		지중 1선	489	3,456,252	3,456,252
			지중 2선		0	0			지중 2선	290	3,776,380	3,776,380
			지중 3선		0	0			지중 3선	50	948,850	948,850
			지중 4선		0	0			지중 4선	154	3,839,220	3,839,220
			지중 5선		0	0			지중 5선	31	957,404	957,404
			지중 6선		0	0			지중 6선	26	957,788	957,788
			지중 7선		0	0			지중 7선	86	3,680,112	3,680,112
			가공 1선		0	0			가공 1선	26	282,880	282,880
			가공 2선		0	0			가공 2선	23	445,648	445,648
	조가선		아연도 강연선(22SQ,/72)		0	0	조가선		아연도 강연선(22SQ,/72)	46	66,286	66,286
	애자및밴드		지주용(신설)		0	0	애자및밴드		지주용(신설)	4	155,044	155,044
	아스팔트 포장복구				0	0	아스팔트 포장복구			232	33,956,912	33,956,912
	맨홀(사각뚜껑포함)		600*600*800		0	0	맨홀(사각뚜껑포함)		600*600*800	4	1,572,208	1,572,208
계						당초	268,906		변경		216,528	-52,378

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	만리재로 보행환경 개선 전기공사
계약금액	211,322,076 천원	계 약 일	2010.10.05.	시 공 사
공사기간	2010.10.05 ~ 2017.12.31	낙 찰 율		설 계 자
계약형태	공개경쟁입찰( ), 턴키(●), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사( )			감 리 자
공사규모	총 연장 : 3.117km - 터 널 : (구로) 1,720m / (사당) 1,753m - 지하차도 : (구로) 877m / (사당) 515m - 공기정화시설 1개소			※ 작성자 : 진종구 (☎ 3708-8636)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증)/감)
변 경 개 요	- 도로운영방안(유료) - 터널 종단경사 변경 (종단경사 S=+0.3%)		- 도로운영방안(무료) - 터널 종단경사 변경 (종단경사 S=-0.3%)	- 도로운영방안 변경 1식 - 터널 종단경사 변경 1식
공 사 비	22,053,300천원		20,157,100천원	감) 1,896,200천원
적 용 요 율	턴키공사		협의율 적용근거 참조
설계변경요구자	☑ 발주처 ▢ 계약상대자
협의율 적용 근거	지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제103조 3항 ※ 관련공문 : 토목부-18233(2017.08.31.) 설계변경에 따른 증가된 공사량 단가협의 결과 통보
설계변경 근거	방 침	⦁도시기반시설본부-16-8064(16.09.21) : 변경설계 작업지시 ⦁도시기반시설본부-17-9332(17.09.21) : 실정보고(도로운영방안 변경설계 처리방안)
설계변경 유형	① 사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ② 설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ④ 민원해결, 보수, 보강 ⑤ 문화재 및 지장물 이설 ⑥ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦ 제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	시장방침 제287호(‘10.07.29)에 의한 도로운영방안 변경설계(유료→무료) 및 신림선 경전철 중첩에 따른 종단경사 변경(0.3%→-0.3%) 설계변경으로 인한 수량 증감
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진

□ 관련문서

- 두산건설-2017-7195(‘17.11.13) : 도로운영방안 및 터널 종단선형 변경에 따른 변경설계 실정보고(설비분야)

□ 붙임1 변경개요

○ 주요 변경사항

1) 도로운영방안(유료→무료) 변경설계 현황

구 분	당초 설계	도로운영방안 변경설계 (유료 → 무료)
평 면 도
도로운영방식	유 료	무 료
영업소	1개소	0개소 (삭제)
기계, 전기, 건축, 조경	-	영업소 축소에 맞춘 설계

2) 터널 종단선형 변경설계 현황

구 분	터널 종단변경 변경설계
평 면 도
도로운영방식	무 료
영업소	없 음
기계, 전기	최신 설계기준 적용(2017년)
주요변경사항	종단선형 변경 : 평균 약 10.0m 하향조정 종단구배 변경 : +0.3% -> -0.3%

○ 전기분야 검토내용

공 종	전기분야 설계변경 반영내용	비 고
전 기	○ 2공구 집수정터널 신설에 따른 연락배전선로 추가 및 덕트 변경	종단선형 변경반영
	○ 2공구 집수정터널 신설에 따른 연락배전용 차단기반 추가설치	종단선형 변경반영
	○ 공공기관에너지이용합리화추진에관한규정에 따라 터널 LED조명 반영	최신기준 설계반영
	○ 공공기관에너지이용합리화추진에관한규정에 따라 풍도 LED조명 반영	최신기준 설계반영
	○ 영업소 삭제로 VMS, LCS 수량증가 케이블 규격 및 수량 변경	영업소 삭제
	○ 서울시 설비부의 감사원 감사 지적사항을 반영한 제트팬 동력 추가	감사원 감사반영
	○ 영업소계획 삭제로 환기소 및 관리소 규모축소 반영	영업소 삭제
	○ 공기정화시설 경관디자인에 의하여 외부 경관조명설비 추가	영업소 삭제
	○ 영업소 삭제로 톨게이트 전기설비 삭제	영업소 삭제

○ 소방(전기)분야 검토내용

공 종	소방(전기)분야 설계변경 반영내용	비 고
소 방 (전 기)	○ 영업소 삭제에 따른 톨게이트 및 영업소 소방설비 축소	영업소 삭제

○ 정보통신분야 검토내용

공 종	정보통신분야 설계변경 반영내용	비 고
정보통신	○ 영업소 삭제로 VMS, LCS 수량증가 및 속도제한표지 반영	영업소 삭제
	○ 지하차도 입구부에 진입 제한차량 감시초소 설치로 CCTV 추가 설치	영업소 삭제
	○ 영업소 삭제로 교통량제어를 고려한 Ramp Metering 시스템 추가	영업소 삭제
	○ 교통영향평가에 따른 지적사항으로 구간 과속단속시스템 추가 설치	교통영향평가 반영
	○ 영업소 삭제에 따른 톨게이트 요금징수시스템 삭제	영업소 삭제

□ 붙임2 공사비 증감 현황

구 분		금 액(천원)			비 고
		당 초	변 경	증 · 감
직 접 공 사 비	전기공사	7,407,813	8,612,172	1,204,359
	정보통신 공 사	4,465,862	2,394,428	-2,071,434
	소방전기 공 사	2,186,927	2,166,583	-20,344
	소 계	14,060,602	13,173,183	-887,419
제 경 비		3,116,584	3,209,984	93,400
물 가 변 동 비		2,444,264	1,528,952	-915,312
한 전 수 탁 비		427,005	412,517	-14,488
공 급 가 액		20,048,455	18,324,636	-1,723,819
부 가 가 치 세		2,004,845	1,832,464	-172,381
총 공 사 비		22,053,300	20,157,100	-1,896,200

□ 붙임3 설계변경 현황

1) 전기분야 변경내용

분 야	설계변경(수량, 공사비) 변경내용	설계변경 금액(천원)
		당 초	변 경	증 · 감
전 기	①연락배전용 특고케이블 6645m, 케이블덕트 1,873m 추가 증)346,298	356,481	702,779	346,298
	②연락배전용 차단기반 4면 추가 설치 증)61,369	1,182,172	1,243,541	61,369
	③공공기관에너지이용합리화추진에관한규정에 따른 터널 LED 조명 836개 반영, 형광등기구 1110개 삭제 및 케이블, 트레이 기타 부속자재 변경 증)657,952	2,593,163	3,251,115	657,952
	④공공기관에너지이용합리화추진에관한규정에 따른 풍도 LED 조명 820개 반영, 형광등 911개 삭제 증)115,731	340,969	456,700	115,731
	⑤영업소 삭제로 VMS, LCS, 최고속도제한표시판의 수량증가에 따른 케이블 규격 및 수량 변경 증)74,362	182,156	256,518	74,362
	⑥서울시 설비부의 감사원 감사 지적사항을 반영한 제트팬 동력 배전반 10면, 케이블 및 케이블트레이 추가 증)616,114	-	616,114	616,114
	⑦영업소 삭제로 공기정화시설 및 관리소 규모 축소 반영 감)-102,142	998,040	895,898	-102,142
	⑧공기정화시설 경관디자인에 의하여 외부 경관조명 추가 증)64,736	-	64,736	64,736
	⑨영업소 삭제로 톨게이트 전기설비 삭제 감)-630,062	630,062	-	-630,062
	⑩기타분야	1,124,770	1,124,771	1
	합 계 (전 기)	7,407,813	8,612,172	1,204,359

2) 소방(전기), 정보통신분야 변경내용

분 야	설계변경(수량, 공사비) 변경내용	설계변경 금액(천원)
		당 초	변 경	증 · 감
소 방 (전 기)	①영업소 삭제에 따른 톨게이트 및 영업소 소방설비 축소 감)20,344	2,186,927	2,166,583	-20,344
	합 계 (소방전기)	2,186,927	2,166,583	-20,344
정 보 통 신	①영업소 삭제로 VMS 2set 추가, LCS 1set 삭제 및 속도 제한표지판 3set 추가 증)94,194	409,864	504,058	94,194
	②진입 제한차량 감시용 CCTV카메라 1set 및 감시시스템 추가 설치 증)52,941	476,906	529,847	52,941
	③교통량제어를 고려한 Ramp Metering 시스템(1공구 해당분) 1set 추가 증)458,843	-	458,843	458,843
	④교통영향평가에 따른 지적사항으로 구간 과속단속시스템(1공구 해당분) 추가 증)251,557	-	251,557	251,557
	⑤톨게이트 요금징수시스템 삭제 감)2,908,762	2,908,762	-	-2,908,762
	⑥영업소 삭제로 톨게이트 및 관리사무소 통신설비 축소 감)34,730	51,299	16,569	-34,730
	⑦기타분야	619,031	633,554	14,523
	합 계 (정보통신)	4,465,862	2,394,428	-2,071,434