문서번호	정보자원운영과-6687
결재일자	2017.12.1.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정보자원운영과장	데이터센터소장
박종순		김기항	12/01 김현규
협 조
	인터넷통신과장			황기원
	주무관			류은희
	주무관			지창원

「클라우드센터 2단계 이전·이관」 사업관련

상수도 사업본부 장비 이전·이관 모의훈련 계획

2017. 12.

데이터센터

(정보자원운영과)

「클라우드센터 2단계 이전·이관」 사업관련

상수도 사업본부 장비 이전·이관 모의훈련 계획

『클라우드센터 2단계 이전·이관』사업관련 상수도사업본부 전산장비 이전·이관에 대비하여 모의훈련을 실시하여 실 이전·이관에 대비하여 클라우드 센터로 통합 추진하는데 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		개 요

□  추진 근거

❍ IT-Complex 건립 기본계획 수립(’08.6.18, 시장방침 제318호)

❍ 서울시 클라우드 컴퓨팅 기반 사업 추진 계획(단장방침, ’14.10.21)

❍ 서울시 클라우드센터 입주 및 운영 기본계획(단장방침, ’15.6.3)

❍ 클라우드 서비스 실현을 위한 미래형 데이터센터 구축(국장 방침, ’16.3.24)

❍ 클라우드 서비스 확대 적용을 위한 클라우드센터 2단계 이전·구축(국장방침, ’17.3.15)

□  사업 개요

❍ 사 업 명 : 클라우드 서비스 확대 적용을 위한 클라우드센터 2단계 이전·구축

❍ 사 업 비 : 금4,786백만원

❍ 사업기간 : ’17. 8. 25 ~ ’18. 2. 28.(계약일로부터 6개월)

❍ 사업내용

- 5개 전산실 2단계 장비 이전․이관 및 통합체계 구축

- 공개SW 시범환경 확대 및 실 운영환경으로 클라우드 적용

- 시설물 관리 강화를 위한 통합관제시스템(FMS) 기능 보강

- 지진 등 재난재해 대비를 위한 시스템실 면진설비 설치

□  추진 경위

❍ 이관을 위한 테스트환경 구축 제공 : 2017. 3월

- 10개 주요 업무시스템 테스트 환경 구축(클라우드센터 내 신규장비)

❍ 업무 프로그램 이관 및 테스트 : 2017. 4 ~ 11월(상수도사업본부)

- 제공된 소스 내 개발환경 변경, IP, URL, JDK변환 요소에 따른 수정

- 시스템 이관에 따른 종합적 업무테스트 및 타 시스템 연계테스트

❍ 2단계 사업자 현장방문 인터뷰 : 2017. 9월

❍ 착수보고회 개최              : 2017. 9. 12

❍ 장비 실사, 업무협의 및 실이관 환경구축 : 2017. 9. ~ 11월

- 이전 대상 부서 전산실 장비 현황 실사 및 이전·이관 설치 협의

- 실이관 환경 구성 운영 및 테스트 서버 구축 : 총 40대

- AP 이관 테스트 실시

□  이전개요

❍ 업무 부서  : 3개(상수도사업본부 전산운영과, 홍보과, 공간정보과)

❍ 업무시스템 : 요금관리 등 15개

❍ 대상 장비  : 44대(이전 6대, 이관 38대)

- 이전대상 : 서버 4대, SSL VPN 1대, 스토리지 1대

이전대상 : 장비를 물리적으로 위치 이동하여 설치하는 대상

- 이관대상 : 서버 38대

이관대상 : 내용연수가 경과하여 노후화된 장비를 교체하여 신규서버로 업무서비스 및 자료를 이동하여 설치하는 대상

- 추가 이관을 위한 기타 테스트 환경 제공 : 4대

※ 이관에 따른 통합장비 공동 활용

‣ 스토리지 3대, SAN스위치 6대, 통합백업 2대 등

‣ 정보통신 및 보호장비는 기존 인프라 활용

❍ 시스템 이전 대상 및 일정

*************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

※ SSO와 모바일 AP는 업무부서 개발일정에 의해 선 오픈(**********)

※ 고객지원, 자재관리시스템은 상수도사업본부 별도 추진(‘18년 하반기)

Ⅱ		모의훈련계획

□  개 요

❍ 실 환경과 동일한 수준으로 모의훈련을 실시하여 시나리오 검증 및 안정적이고 신속한 이전·이관 방안 마련

❍ 이전시 발생할 수 있는 장애 대비 백업 등 자료 복구 방안 강구

□  추진계획

❍ 일  정 :***************************************

※ 요금관리와 PDA검침업무는 배치작업으로 *************부터 서비스 중단

❍ 대상업무

: **************************************************************

❍ 참여자 : 총 68명

- 상수도사업본부 : 업무담당자 및 이관관련 업체 엔지니어 (48명)

- 데이터센터(6명)

‣ 정보자원운영과장, 류은희, 박종순, 지창원

‣ 인터넷통신과 최정윤, 최재철

- 클라우드센터 인프라구축 2단계 사업자 및 운영관리담당자(14명)

❍ 작업내용 및 절차

- 모든 서버의 최종 백업 실시(전체 백업 및 변동분 백업)

- 상수도사업본부 내 운영 서비스 및 클라우드센터 서비스 중단

- DB자료 및 AP서버 자료 이관

· DB는 DB 제공 툴을 이용하여 자료 추출 및 업로드 실시.

단, 요금관리는 동기화 툴을 이용하여 *****일부터 동기화 작업실시

· AP서버 자료는 NAS 또는 ftp를 활용하여 자료 최종본 동기화실시

- 이전대상 장비 4대는 전원 Off후 전원코드 제거, 1시간 대기후 장비 재부팅후 장비 정상여부 확인

- 각 단계별 및 장비별 작업 진행사항 Check List 작성

- 클라우드센터 서버로 서비스 가동후 업무 서비스 확인

- 연계 기관 서비스 확인

- 클라우드센터 서비스 중단

- 상수도사업본부내 서비스 가동후 서비스 정상 확인

❍ 작업 진행사항 확인

- **********************

❍ 이전시나리오 : 붙임#1 참고

Ⅲ		행정 사항

□ 업무부서 협조사항

❍ 서비스중단 공지 및 서비스 중단/가동, 서비스확인

❍ 유관기관(부서) 작업(연계시스템)간 협조 : 각 기관 업무 담당자, 엔지니어 및 방화벽 담당자 비상대기

❍ 모의훈련시 업무 담당자 및 유지보수 업체 작업 지원

❍ 업무부서 담당자 접근권한 신청 및 방화벽 룰등록 변경 요청

❍ DNS 설정 변경 요청 및 IP 변경에 따른 연계서비스 업무협의 및 일정 공유

❍ 서버 및 DB 접속을 위해 접근통제시스템에 사용자 및 권한 등록

❍ 업무서비스 이관 환경설정(업무용 SW설치), DB데이터이관(정합성 검증) 및 테스트

❍ DB이중화에 따른 암호화 솔루션 추가 확보

□ 특별 휴가 실시

❍ 휴가대상 : 휴일 근무 및 철야 작업 참여자

❍ 실시기간 : 1개월 이내 실시

- 팀내 업무 공백이 발생치 않도록 일정 조정 시행

※ 2017년 서울특별시 공무원 휴가 등 업무지침 (행정1부시장 방침 제12호, ’17. 1. 18.)

붙임 : 1. 이관대상현황 1부

2. 이전·이관 시나리오 1부

3. 모의훈련 계획서 1부.  끝.