문서번호	설비부-20294
결재일자	2017.12.1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
박병환		임현근	12/01 권오식
협 조
	송변전과장			代이재복
	건축설비과장			김은덕
	녹색성장과장			오삼록

『동부간선도로 확장 3공구 전기공사』

본부 설계변경 자문위원회 개최 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 12.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『동부간선도로 확장 3공구 전기공사』

본부 설계변경 자문위원회 개최 계획

「동부간선도로 확장 3공구 전기공사」에 대한 본부 설계변경 자문위원회를 아래와 같이 개최 하고자 함.

1		공 사 개 요

□ 공 사 명: 동부간선도로 확장 3공구 전기공사

□ 규   모: 상계주공16단지~의정부시계간 2.25㎞(4차선→6차선)

LED조명등 674개, 수배전반 1식, 자동제어반 1식, 소화설비 등

□ 사업기간: *************************

□ 공사금액: ***********

□ 시 공 사: *****

□ 감 리 사: **********

2		설계변경 사유 및 주요내용

□ 설계변경 사유

○ 동부간선도로 확장으로 인한 소음발생 민원 해소를 위해 기존 가로등설비에서 방음벽 형식으로 변경하기 위한 설계변경이 필요함.

□ 설계변경 주요내용

○ 방음벽터널 조명설비 1식

○ 전력인입 및 간선설비 1식

○ 자동제어설비(환기제어, 전력제어) 1식

○ 소화설비 등

□ 설계변경 추정금액

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감
공급가액	*********	*********	**********
부 가 세	*******	*******	********
전기사용료	******	******	*
합 계	*********	*********	**********

3		본부 설계변경 위원회 개최

□ 안 건: 동부간선도로 확장 3공구 전기공사 설계변경 자문

□ 사 유: 10억원 이상 증감시 본부 설계변경 자문위원회 구성

□ 일 시: ********************

□ 장 소: 도시기반시설본부 설비부 회의실(15층)

□ 본부 설계변경 자문위원회 구성(7명)

○ 위 원 장: ********

○ 간    사: ******************

○ 심의위원: 5명

- 내부위원(2명): ******************

******************

- 외부위원(3명):****************

***************

***************

○ 자문내용: 설계변경 적정성 및 보완사항 자문

4		행정사항

□ 설계변경

○ 자문위원 심의결과를 반영하여 설계변경 시행.

□ 자문위원 수당지급

○ 자문위원 수당: ******************************

※ 자문수당 지급지준 : 2017년도 예산편성 잠정기준

*****************************

○ 예산과목: (광역교통시설특별회계)도로건설, 광역도로건설, 동부간선도로확장(녹천교~의정부시계), 시설부대비.

따로붙임 : 1. 관련 공문 1부. 끝.