문서번호	도시철도토목부-15611
결재일자	2017.12.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목3과장	도시철도토목부장
정삼기		호경수	12/01 김진팔
협 조
	주무관			이재선

『지하철 923공구 건설공사』938정거장 #2번 출입구 추가설치 민원 』

시 의 원  면 담 결 과  보 고

2017. 11.

도시철도토목부장

『지하철 923공구 건설공사』938정거장 #2출입구 추가설치 민원

시 의 원  면 담 결 과  보 고

「지하철 923공구 건설공사」 938정거장 #2출입구 추가설치 민원  시의원 면담 결과 보고 임

□ 면담개요

○ 일    시 : ‘17. 11.27(월) 13:30~

○ 장    소 : 시의원 연구실(서소문 별관 601호)

○ 참 석 자 : 4명

- 의     회 : 박호근 시의원(더불어민주당/행정자치/강동4)

- 본     부 : 도시철도토목부장, 토목3과장, 공사관리관

□ 면담결과

○ 요청사항

- 중앙보훈병원 이용자들의 편의를 위해 출입구를 보훈병원 정문~잔디광장까지 추가로 연장하여 설치 요청 (박호근 시의원)

- 일자산 측 보도폭이 협소하니 보도 확폭 건의 요망

- 연장된 출입구가 300m인 곳(청담역)도 있는데 왜 설치해 주지 않는지?

- 923공구 #2번 출입구 추가 설치 타당성 용역예산(35백만원) 배정해 주었는데 도시기반시설본부는 타당성이 없음으로 추진하지 않았음

- 주민 설명회 (‘17.12.14.~15.중) 개최 요망

· 장  소 : 초등학교 강당 등

· 참석인사 : 국회의원 심재권(강동을, 더불어민주당),

시의원 박호근 (둔촌동, 성내동 더불어민주당)

구의원 김연후 (둔촌동)

- 추진경위 사본 제출 요망(11.28. 전달완료)

○ 주요 보고 내용

- ‘11. 3.10. 길동진흥아파트 재건축 정비사업조합 김동희 등 2,896명 진정민원 제출하여, 일부 의견을 반영하여 당초 기본설계 보다 아파트쪽으로 정거장은 60m, #2출입구는 159m 이동 설치 하였음.

(5년 6개월 동안 추가 민원이 없었음)

- ‘16.12.16. 둔촌 푸르지오아파트 입주자 대표 윤원근 및 지역주민(5,040명) 출입구를 연장 설치하여 달라는 민원을 제출하였음.

- 정거장 출입구는 계획시부터 지하상가, 지하보도, 환승, 지하주차장 등 당초 용도를 감안 계획하였음.

- 출입구 추가 설치 검토 개요

· 지역주민요구(#2출입구에서 210m 지점)

▶ 공사규모 : 4.2m(폭), 소요예산 : 87억 소요

▶ 향후 지하철 운영시 출입구 이용율 대비 경제성 및 효율성 미흡

▶ 피난 대피시간 8.2분으로 대피시간 6분초과로 안전기준 미달

▶ 통신관(100×2), 하수관(￠600)

· 횡단보도 지하통과 (#2출입구에서 80m 지점)

▶ 공사규모 : 4.2m(폭), 소요예산 : 63억 소요

▶ 향후 지하철 운영시 출입구 이용율 대비 경제성 및 효율성 미흡

▶ 보훈병원 지하주차장 보강구조물 어스앙카 저촉 및 토지보상(200㎡) 필요

▶ 한전관로(￠200×2), 통신관(100×2), 상수도(￠500), 하수관(￠600)

- #2출입구 여유공간은 12.5~18.5m로 설계지침 6m 이상 충족하여 안전

※「도시철도 정거장 및 환승․편의시설 설계지침」(국토교통부고시 제2013-764호)

▶ 전면 최소여유공간은 외부계단~지상도로 : 6m

- 안전시설 대안

· 현대 및 둔촌 푸르지오아파트 방향으로 협소한 보도폭은 5m로 확장

- 보도폭 : 1.5m → 5.0m(3.5m 확폭), 길이 90m

- 추가사업비 : 800백만원(보상비 610, 설계비 20, 공사비 170)

· 보훈병원 진출입로 횡단보도에 신호등 설치 등 도로교통 안전시설물을 추가 확보하여 보행자 안전 확보

- 보행신호등 (2개소 설치)

- 공사비 : 30백만원

□ 향후계획

○ 일자산 측 동남로 보도가 협소하니 보도확폭 건의 예정(도로계획과)

붙임  보고자료 1부.  끝.