문서번호	도시철도토목부-15603
결재일자	2017.12.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		궤도과장	도시철도토목부장
김근수		최진규	12/01 김진팔
협 조
	주무관			최경호
	주무관			조태현

『서울지하철 9호선 3단계 궤도공사(1,2공구)』

설계변경 자문소위원회 결과보고

2017. 11.

도시기반시설본부

(도시철도 토목부)

『서울지하철 9호선 3단계 궤도공사』

설계변경 자문소위원회 결과보고

『서울지하철 9호선 3단계 궤도공사(1공구 및 2공구)』설계변경 자문(소)위원회를 개최하고 그 결과를 보고 드림

관련근거

설계변경자문회의(위원회) 운영 일부 개정 알림 : 토목부-4715(‘15.03.09)

- 서울특별시장 주요 현안사항 보고(‘15.03.02)

자문대상 : 1건당 증․감액이 5천만원 이상~10억원 미만 공사

- 단순 물량(수량) 변동 사항으로 단가 및 공종변경 없이 5천만원 이상

- 설계도서 내용 불투명, 누락 오류, 상호모순

자문내용 : 설계변경 사유의 적정성

신규 단가적용 및 변경 물량의 적정성

시공 및 품질관리의 적정성 등

설계변경 자문 (소)위원회 개최 현황

일    시 : 2017. 11. 30(목) 14:00

장    소 : 도시기반시설본부 14층 회의실

자문안건 : 5건

- 9호선 3단계 궤도공사(1공구) : 분기기 구간 사급자재 공제 등 3건

- 9호선 3단계 궤도공사(2공구) : 설계도서 수량산출 오류 등 2건

자문위원회 구성

- 위 원 장 : 궤도과장

- 간    사 : 김 근 수

- 외부위원 : 주봉규(서울교통공사 궤도사업소장), 김우종(하남1공구 궤도공사 책임감리원), 조영우(동부엔지니어링)

- 내부위원 : 문병종, 정삼기 주무관

위원 외 참석대상자 : 건설사업관리기술자, 현장대리인 등

자문결과

1,2공구 : 5건 전체 원안가결

구 분	자 문 의 견	사업비 증·감
1공구	▷원안가결 - 분기기 설치구간 사급자재 산출 오류	감207,579천원
	▷원안가결 - EGI안전휀스 설치 제외	감236,579천원
	▷원안가결 - 분기기 철관장치 및 무도유 상판 설치	증61,745천원
2공구	▷원안가결 - 분기기 설치구간 사급자재 산출 오류	감158,992천원
	▷원안가결 - EGI안전휀스 설치 제외	감149,834천원

행정사항

상기의 설계변경 자문(소)위원회의 결과를 건설사업관리단 통보하여 설계변경(준공)에 반영 시행하고자 함

외부 자문위원 수당지급(2인 계좌입금)

- 소요예산액 : 300,000원(150,000원 × 2인)

※ 산출내역 : 10만원(기본) + 5만원(2시간 초과)

- 내부위원 미지급(본부에서 발주하여 시행하는 공사 참여자 포함)

예산과목 : 도시철도건설, 도시철도건설사업, 도시철도9호선3단계 건설, 시설비및부대비, 시설부대비

따로붙임 : 1. 설계변경 자문(소)위원회 자문의견 각 1부.

2. 자문회의 사진 1부.

3. 외부자문위원 수당지급 대상내역 1부.  끝.