투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)	공사감독2처장
제목	추가 작업지시(우이교 내진성능 보강공사)

1. 서울시설공단 공사감독2처14428(2017.11.24.)호와 관련입니다

2. 귀 공단에서 위탁감독 수행중인 『우이교 내진성능 보강공사』현장 물량조사서     제출 건에 대하여 검토 결과 타당하여 추가 작업지시하니 공사 시행에 철저 바라며.

3. 추가 작업에 소요되는 예산은 낙찰차액(145,501,120원)을 활용하여 예산범위내에서     설계변경 및 정산하시기 바랍니다.

붙임 : 검토 보고서 1부.  끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
주무관	홍정식		시설보수과장	12/01 代김영원
협조자
시행	시설보수과-10602	(		)	접수		(		)
우	01137	서울 강북구 한천로 913	/	www.seoul.go.kr
전화	944-5451	/전송	945-5073	/		/	대시민공개