투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	(주)삼우공간건축사사무소
(경유)
제 목	'남부도로사업소 청사신축 기계설비공사’ 제1차공사분 변경계약 알림

1. ㈜삼우공간 제2017-616호(2017.11.27.)와 관련 입니다.

2. 우리 본부에서 추진 중인 ‘남부도로사업소 청사신축 기계설비공사’ 제1차분의 공사금액 및 계약기간이 아래와 같이 변경계약 되었음을 알려드리니 책임건설사업관리 업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공사명: 남부도로사업소 청사신축 기계설비공사(1차공사)

나. 계약자: ㈜대윤기술공영

다. 변경내용: 총차분 변경 없이 1차분의 공사금액 조정 및 공기 연장

계약구분	계약금액(원)		공 사 기 간		비 고
	당초	변경	당 초	변 경
총 차	1,409,476,000	1,409,476,000	2017.11.17. ~ 2019.05.16.	2017.11.17. ~ 2019.05.16.	□총차: 변동없음
1 차	30,000,000	190,000,000	2017.11.17. ~ 2018.06.30.	2017.06.30. ~ 2018.11.30	□1차공사분 변동내역 금액: 160,000,000원(증) 공기: 153일(증)

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김인호		열빛총괄과장	유병기		설비부장	전결 12/01 권오식
협조자
시행	설비부-20348	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8603	/전송	02-3708-8659	/	ijhw21@seoul.go.kr	/	대시민공개