【별지 제1호서식】

공사계약 변경 심사요청서[2017년 아리수 직결음수대 설치공사(금나래초교 외 12개소)]

부분공개(5)

시 행	급수운영과-29297
시행일자
수 신 자	서울특별시상수도사업본부장(재무회계과장)
접수번호
접수일자

주무관		주무관	급수운영과장			결재
배진원		강동길	전결 12/01 代이경희
협 조

공 사 명	2017년 아리수 직결음수대 설치공사(금나래초교 외 12개소)	요청기관		남부수도사업소 급수운영과
공사위치	금천구 일대
공사기간	착공일로부터 160일간		계약방법		전자공개수의계약
공사금액	․ 도 급 비 : 79,010,300원 ⇒ 225,302,000원(원 146,291,700원 증액)
설 계 자 시 공 사	․ 상 호 : 남부수도사업소 ․ 대 표 자 : 전 영 석 ․ 담 당 자 : 배 진 원( 전화번호 : 3146-4546 ) ․ 상 호 : ****************․ 대 표 자 :****** ․ 현장소장 : *********: **************
발 주 처	․ 담 당 자 : 배 진 원( 전화번호 : 3146-4546 )
◦ 공사개요 - 상수도관 부설 : D=15~25mm, L=1,122m ⇒ D=15~25mm, L=1,650m - 배 수 관 부설 : D=30mm, L=148m ⇒ D=30mm, L=577m - 기타 배관부속 자재 물량 증감 ◦ 설계변경사유 - 급수설비과-805(2017.1.)호와 관련하여 금년도 마지막으로 시행되는 아리수 직결음수대 설치공사에 2차 추가설치 요구분 조사시 기존 13개교에서 21개교로 신청학교가 늘었으며, 학교 공사시 천정과 같은 내부배관의 미관저해 민원등의 사유로 공사 시, 배관부속 자재 수량 증감
◦ 첨부서류 1. 공사원가제비율검증표 1부. 2. 설계도서 각(설계변경 전, 후) 1부(원가계산서, 시방서, 내역서, 단가산출서, 물량산출서) 3. 설계도면 및 그 밖에 관련문서 1부.(용량초과로 별도송부) 끝.

	남부수도사업소장

본문내용을 입력하세요