문서번호	건축부-20749
결재일자	2017.12.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축총괄과장	건축부장
이호경		박범규	12/01 김진용
협조

「시립중랑노인전문요양원 증축공사」 건설폐기물 처리용역 시행계획

2017. 12.

도시기반시설본부

시설국 건축부

「시립중랑노인전문요양원 증축공사」

건설폐기물 처리용역 시행계획

우리 본부에서 추진 중인 「시립중랑노인전문요양원 증축공사」의 건설폐기물 처리용역을 다음과 같이 계획수립하여 시행하고자 함

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 시립중랑노인전문요양원 증축공사 건설폐기물 처리용역

○ 위    치 : 서울시 중랑구 망우동 227(시립북부병원 부지)

○ 용 역 비 : 24,442,000원(부가가치세 포함)

○ 용역기간 : 착수일로부터 11개월

○ 용역내용 : 건설폐기물 수집․운반 및 처리

- 처리물량 : 454.562톤

(폐콘크리트 172.192톤, 폐아스콘 255톤, 임목폐기물 4.937톤, 폐금속류 17톤, 폐타일 및 폐도자기 1.382톤 , 폐보드류 4.051톤)

- 내    용 : 공사관련 건설폐기물 수집․운반 및 처리

□ 추진경위

○ ‘16.   4.  7 : 시립중랑노인전문요양원 증축계획(어르신복지과)

○ ‘16.   8. 23 : 시립중랑노인전문요양원 증축계획 변경(어르신복지과)

○ ‘16.  11. 24 : 설계공모(도시공간개선단)

○ ‘17.   2. 23 ~ ’17. 11. 4 : 설계용역(도기본 건축부)

○ ‘17.  11. 17 : 건축공사 시행 및 계약 의뢰

○ ‘17.  11. 29 : 건설사업관리용역업체 사업수행평가결과 알림 및 계약 의뢰

○ ‘17.  11. 1.현재 : 공사 및 건설사업관리용역자 선정중

□ 건설폐기물 처리용역 발주계획

○ 입찰방법 : 제한경쟁입찰(지역제한) / 긴급 입찰

○ 입찰참가자격

- 지역제한 : 입찰자는 입찰공고일 전일부터 입찰일까지, 낙찰자는 계약 체결일까지 주된 영업소가 서울특별시에 소재한 업체

- 보유면허 : 폐기물 관리법 제25조, 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 제21조 및 건설페기물의 처리 및 재활용 관련 업무처리지침(환경부 예규 제552호, 2015.08.10)에 따른 건설폐기물 수집․운반업과 건설폐기물 중간처리업허가를 모두 득한 업체

- 공동도급 : 자격 보완을 위하여 건설폐기물수집․운반업 허가만 득한 업체는 서울특별시, 경기도, 인천지역의 중간처리업체와 공동도급(분담이행방식)이 가능하며, 이 경우 대표자는 서울특별시에 소재한 업체이어야 함

○ 예산과목 : 복지본부 어르신복지과, 어르신 복지수준 향상 및 장사시설 운영내실화, 치매어르신지원강화, 어르신복지시설 설치지원, 시설비

□ 향후계획

○ ‘17. 12. : 건설폐기물 처리용역 시행 및 계약 의뢰(건설총괄부)

○ ‘17. 12. : 계약 및 착수

○ ‘18. 11. : 용역 준공(예정)

붙임 : 과업내용서 및 내역서.  끝