투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	준공기간 변경 계약의뢰(서울기록원 건립 전기, 통신공사 (1차))

1. 우리 본부에서 시행중인 「서울기록원 건립 전기, 통신공사(1차)」에 대하여 다음과 같이 설계변경 계약의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울기록원 건립 전기, 통신공사(1차)

나. 계 약 자 : 전기공사 - 한빛시스템(주) 대표 윤명호

통신공사 - (주)이앤비원 대표 박재모

다. 공사금액 : (변경없음)

(단위:원)

구 분		전기공사	통신공사	비고
도 급 비	총차	*************	***********
	1차	***********	***********

라. 준공기한 연기

구 분	차 수	공 사 기 간		비고
		당 초	변 경
전기공사	총차	2016.04.20. ~ 2018.10.17.	2016.04.20. ~ 2018.10.17.	변경없음
	1차	2016.04.20. ~ 2017.12.11	2016.04.20. ~ 2018.01.31	(증)51일
통신공사	총차	2016.04.11. ~ 2018.10.17.	2016.04.11. ~ 2018.10.17.	변경없음
	1차	2016.04.11. ~ 2017.12.11.	2016.04.11. ~ 2018.01.31.	(증)51일

마. 설계변경사유 : 선행공정인 지연에 따른 후속공정인 전기 및 통시공사 작업시기 미도래로 공사기간 연장.

바. 귀책사유 및 지체상금 부과여부 : 도시기반시설본부, 미부과.

붙임 1. 준공기한 연기요청 보고서 1부.

2. 합의서 각 1부.  끝

	설비부장
주무관	곽용길		환경설비과장	代이호기		설비부장	12/01 권오식
협조자	경리과장	최정수
시행	설비부-20285	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8616	/전송	02-3708-8659	/	yong9345@seoul.go.kr	/	부분공개(5)