투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	공원여가과장
(경유)
제 목	변경계약 체결 통보(노을천문대 리모델링 전기공사)

1. 공원여가과-2311(2017. 11. 24.)호와 관련됩니다.

2. 위 호와 관련하여 다음과 같이 변경계약이 체결되었음을 통보합니다.

가. 건    명 : 노을천문대 조성을 위한 리모델링 전기공사

나. 계 약 자 : 부민통신 주식회사 대표 박창욱

다. 계약금액 : 금14,352,390원(금일천사백삼십오만이천삼백구십원)

라. 공사기간 : 2017. 10. 18.~ 2017. 12. 1.

마. 변경내용 : 준공기한 변경

○ 당초 : 2017. 12. 1. → 변경 : 2017. 12. 11.

붙임  공사계약서류 각 1부.  끝.

	공원운영과장
★주무관	김호영		주무관	代김선희		공원운영과장	12/01 문근식
협조자
시행	공원운영과-19588	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243-60	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr/
전화	300-5512	/전송	300-5527	/	sky500611@seoul.go.kr	/	부분공개(6)