문서번호	한양도성도감-12299
결재일자	2017.12.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	도성관리팀장	한양도성도감과장		문화본부장
정윤모	곽동진	심말숙		12/01 서정협
협 조

「남산 회현자락 한양도성 현장 유적박물관 실시설계용역」

설 계 변 경   검 토 보 고

2017. 11.

문화본부장

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

「남산 회현자락 한양도성 현장 유적박물관 실시설계용역」

설 계 변 경   검 토 보 고

「남산 회현자락 한양도성 현장 유적박물관 실시설계용역」시행 중    추가 과업에 따른 계약금액 조정과 실시설계에 따른 공원조성 계획   변경 및 문화재청 설계 승인 등 행정절차 이행에 따른 과업기간 조정 등   과업 내용이 변경됨에 따라 설계변경 시행코자 함

용역 결과의 내실 등을 기하기 위하여 용역기간을 연장하고자 함

Ⅰ		용역 개요

○ 용 역 명 : 남산 회현자락 한양도성 현장 유적박물관 실시설계

○ 용역기간 : 2017.6.12 ~ 2017.12.12.

○ 계약업체 : 협동원건축사사무소외 1(대표자 이민아)

○ 계약금액 : 284,490,000원

○ 주요 과업내용

- 지형 현황측량, 지질조사 등 설계에 필요한 제반 조사

- 실시설계 도서 작성

- 관련 법령에 의한 심의, 협의, 인·허가 등 행정절차 이행을 위한 자료 작성 등

Ⅱ		추진 경위

○ 2017.1.26.   : 국제 설계공모 공고

- 참가 등록 : 총 120개 업체(국내 49, 해외 71)

○ 2017.4.3.~4.21. : 작품 심사 및 당선작 선정

- 작품 접수 : 21점(국내 14, 해외 7)

○ 2017.5.15.   : 실시설계 용역 시행계획 수립

○ 2017.6.12.   : 실시설계 용역 계약 및 착수

○ 2017.7.6.     : 용역 착수보고회 개최

○ 2017.6.~11. : 실시설계안 TF자문회의(4회)

Ⅲ		용역 변경 계획

1. 추가 과업에 따른 용역 금액 조정

가. 추가과업 내용

구 분	당초 과업 내용	변경(추가) 과업 내용
전시공간(전시실) 설계	부속건물(관리실,인포센터) 연면적 148.2㎡ 이내	※ 인포센터내 전시공간(전시실) 설계 추가 150㎡ 부속건물(관리실,인포센터,전시실) 연면적 300㎡
기존 화장실 철거 및 신축 설계	기존 화장실 존치	기존 화장실 철거(109.2㎡) 화장실 신축

나. 용역금액 조정

구 분	변 경 전	변 경 후	증 감
설계용역비	284,490,000원	298,595,000원	증 14,105,000원

※ 계약내역서에 근거하여 공사비 증가에 따라 요율 적용 반영

※ 기존 화장실 철거 및 신축 설계는 계약업체에서 설계공모 당시 제안하여 계약내용에 포함된 사항으로 용역금액 조정에서 제외

○ 예산상 조치 : 추가 과업에 대한 용역비 증가 금액(14,105,000원) 집행 계획

-「남산 회현자락 한양도성 보존정비(시설비)」예산 잔액(10,731,200원)과 부족한 예산(3,373,800원)은 낙찰 차액으로 집행

※ 예산과목 : 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존관리활용, 한양도성보존정비,  남산 회현자락 한양도성 보존정비, 시설비

다. 용역기간 조정

○ 조정사유 : 추가 과업 수행 및 실시설계에 따른 공원조성계획 변경 및 문화 재청 설계 승인 등 행정 절차 이행에 따른 절대공기 부족

○ 조정내용

구 분	변 경 전	변 경 후	증 감
용역 기간	2017.6.12.~2017.12.12	2017.6.12.~2018.6.12	증 6개월

○ 귀책사유 : 서울특별시

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅳ		조치 의견

○ 설계 과업내용 변경에 따른 용역비 및 기간 조정이 타당한 것으로 판단되어 계약변경하고 용역에 만전을 기하고자 함

Ⅴ		향후 계획

○ 2017.11. : 계약변경 의뢰(재무과)

○ 2018. 6. : 용역 준공

붙임  용역 수행업체 합의각서 및 변경설계서 각 1부. 끝.