문서번호	조경과-6866
결재일자	2017.12.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관	조경과장
김근주	12/04 강인호
협 조

「호숫가 전망좋은길 진입데크 설치공사」

실정사항 검토보고

2017. 5.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

「호숫가 전망좋은길 진입데크 설치공사」실정사항 검토보고

「호숫가전망좋은길 진입데크 설치공사」추진과 관련 실정사항에 대하여 검토하고 아래와 같이 조치하고자 함

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 호숫가전망좋은길 진입데크 설치공사

○ 공사기간 : 2017. 11. 13 ~ 12. 12

○ 도 급 액 : 금35,320,600원

○ 도 급 자 : 미류엘엔씨 ㈜ 유희용, 윤형렬

□ 실정검토 사항

구 분	현황 및 문제점	검 토 의 견	비 고
시설물공사	○ 데크계단 현장여건상 연장이 늘어나고 계단앞면, 측면 마감 등을 위해 목재물량 증가 ○ 지형의 급경사로 인해 첫번째 계단참 조성이 어려움 ○ 데크설치후 출렁거림을 방지하기 위해 멍에와 장선 간격조절 필요 ○ 설치구간의 경사가 일정하지 않아 조립형 안전난간 설치가 어려움 ○ 사면일부 절토로 인해 노출부분 경관훼손 우려	○ 추가 목재물량 조달 구매 □당초 43㎡ → 변경 77㎡ (증34㎡) ○ 연접한 평지를 활용 계단참 조성 ○ 멍에와 장선 설치간격 변경 □멍에 : 당초 750 → 변경 1500 □장선 : 당초 750 → 변경 500 ○ 조립형 난간을 경사조절 가능한 난간으로 교체하고 견고한 기둥 고정을 위해 ㄷ자형 철판을 ㅁ자형 으로 교체 ○ 안전난간과 연계하여 목재마감 으로 경관 고려
철거 공사	○ 폐기물이 조경석과 자연목을 건조한 것으로 현장내 재활용 가능	○ 조경석은 현장내 재활용하고 목재는 비오톱 조성

○ 현황사진

평지를 활용 계단참 조성	사면 일부 경관개선을 위해 목재 마감

□ 처리계획

○ 위 검토내용과 같이 공사여건이 변경되었기에 본 사업의 시급성을 감안 우선 시공토록 조치하고 추후 설계변경 처리하고자 함

- 추가소요 예산은 향후 공사 낙찰차액 활용하여 정산처리

- 목재 증가물량(34㎡) 관급자재 변경 요청   끝.