＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	남부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	상수도공사 시행에 따른 협조 요청

1. 귀 청(소)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 청(소) 포장덧씌우기 작업 예정 구간 내에 우리사업소에서  ‘난곡사거리~미성초등학교간 송배수관정비공사’를 시행중으로, 전체 공정중 잔여 공정이 난곡사거리 하수도암거(3mx2열) 구조물을 횡단하는 구간만 남아있으나, 공사중 하수암거 하부에서 다량의 지하수가 유입되어 공사추진이 더디게 진행되고 있는 실정입니다.

3. 본 사업은 우리시에서 역점적으로 추진한 뚝도정수장 현대화사업 준공에 따른 대체 급수 환원을 위한 사전조치 공사로 부득이 2017년도에 완료되어야 하는 실정입니다.

4. 이에 동 구간 포장덧씌우기 작업을 2017. 12. 15.까지 연기 요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 공사명 : 난곡사거리~미성초등학교간 송배수관정비공사

***************************

다. 공사기간 : 2017. 5.18. ~ 2017. 12. 16.

라. 도종 및 연장 : ASP-1, L=20m

마. 부설관로 : D=600mm

붙임  위치도 1부.  끝.

	남부수도사업소장
수신자	남부도로사업소장(도로보수과장),관악구청장(토목과장)
주무관	이철		급수설비팀장	이경희		급수운영과장	전결 12/04 최철민
협조자
시행	급수운영과-29496	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	02-3146-4552	/전송	02-3146-4589	/	chul2@seoul.go.kr	/	부분공개(6)