투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	공사 준공기한 연기요청(봉화캠핑장 전기·통신·소방 공사)

우리 사업소에서 시행하고 있는 『2017 가족자연체험시설 조성공사』 전기, 전기소방 분야 시행과 관련 아래와 같이 준공기한을 연기 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 준공기한 연기요청

항목		전기	통신	소방
공사명		봉화황평분교가족자 연체험시설전기공사	봉화황평분교가족자 연체험시설통신공사	봉화황평분교가족자 연체험시설소방공사
도급액(원)		74,490,000	18,687,200	11,152,030
공사기간		‘17.10.26.～’17.12.08	‘17.10.30.～’17.12.08	‘17.10.26.～’17.12.08
도급자		우진건설(주) 권제원	우신통신(주) 장성주	㈜산업전기소방 김진현
준공기 한연기	당초	‘17.10.26～’17.12.08	‘17.10.30～’17.12.08	‘17.10.26～’17.12.08
	변경	‘17.10.26～’17.12.21	‘17.10.30～’17.12.21	‘17.10.26～’17.12.21

붙 임 : 1. 공사준공기한 연기검토보고서 1부.

2. 공사준공기한 연기의뢰서 3부.  끝.

	시설과장
주무관	강희진		시설관리팀장	代강희진		시설과장	12/04 진병규
협조자
시행	시설과-3809	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33 (신대방동)	/
전화	02-2181-1156	/전송	02-2181-1169	/	jhg815@seoul.go.kr	/	대시민공개