문서번호	도로관리과-19604
결재일자	2017.12.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로포장안전팀장	도로관리과장
구준서		임영철	12/04 배광환
협조
	도로포장연구센터장		백종은

함께 만드는 안전한 행복도시 서울

포트홀 발생 빈발구간 합동조사 계획

2017.12.

안전총괄본부

(도로관리과)

포트홀 발생 빈발구간 합동조사 계획

사업소별 포트홀 발생 빈발구간의 합동조사를 실시하여 구간별 포트홀 빈발원인 분석 및 정비방안을 마련하고자 함

□ 추진방향

○ 도로관리과, 도로포장연구센터, 도로사업소, 외부전문가 합동으로 조사반 구성

○ 현장조사 및 품질시험을 통한 포트홀 빈발원인 분석

○ 원인분석 결과에 따라 구간별 정비방안 마련

□ 조사계획

○ 조사대상 : 사업소별 빈발구간(총29개소, 사업소 자체조사)

계	동부	서부	남부	북부	성동	강서
29개소	8개소	7개소	4개소	3개소	3개소	4개소

※ 세부위치는 사업소별 포트홀발생 빈발구간(붙임) 참조

○ 조사기간 : 2017.12.1.~2018.1.31.(2개월)

- 현장조사(1차) : ’17.12.1~12.31.

- 품질시험(2차) : ’18.1.1~’18.1.31.(1차조사 결과 필요구간)

○ 조사반 편성(안)

- 도로관리과, 도로포장연구센터, 도로사업소, 외부전문가 합동조사

조사구간		동 부 (8개소)	서 부 (7개소)	남 부 (4개소)	북 부 (3개소)	성 동 (3개소)	강 서 (4개소)
조사자	도 로 관리과	김종민	정기찬	윤현주	윤현주	구준서	구준서
	도로포장 연구센터	김태우	김태우	김태우	이진욱	이진욱	이진욱
	도 로 사업소	이민호	정병구	조경현	이화신	김용면	김동민
	외부전문가(한국건설기술연구원) : 2차 합동조사(품질시험 및 분석)

※ 품질시험소 2차시험 불가(장비부재)로 한국건설기술연구원에 의뢰

□ 조사항목 및 내용

구 분		조사목적	조사항목	비 고
사전조사	기초조사	기초자료 작성	버스교통량, 배합설계 및 관리시험 결과 등	사업소 제출
1차조사	육안검사	현장 확인	육안조사, 현장사진 촬영, 2차조사 항목 및 위치 검토
	밀도조사	현장밀도 확인	밀도,(공극률, 다짐도) (현장밀도측정기 측정)
2차조사 (필요시)	포장층 상부조사	아스팔트층 손상여부	균열깊이, 열화 등(코어채취)
	층간 부착력조사	아스팔트층간(표층/중충) 부착상태	부착력(부착강도시험) ※건전구간과 상대비교	한국건설기술 연구원
	재료간 결합력조사	재료간(아스팔트/골재) 결합상태	간접인장강도비(TSR) ※건전구간과 상대비교

※ 2차조사시 도로사업소 협조사항 : 교통안전처리, 코어채취 및 의뢰

※ 시료채취시 건전/비건전 구간으로 구분하여 코어 채취(150mm)

□ 향후계획

○ ’18. 2월 : 포트홀 빈발구간 원인분석 및 정비방안 마련

- 1,2차 조사결과를 분석하여 포트홀 빈발구간 원인분석 실시(필요시 외부자문)

○ ’18. 3월(동절기이후)~ : 원인분석 결과에 따른 구간별 정비

□ 행정사항

○ 소요예산  : 4,050,000원(금사백오만원)

- 외부전문가 현장수당 지급(품질시험비 포함) : 270,000원 X 15일 = 4,050,000원

- 2차 현장조사 실제 참여일수로 정산하여 지급

※ 엔지니어링 기술자(특급기술자) 노임단가 기준(270,333원/일)

- 예산과목 : 안전총괄본부 도로관리과, 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리(도시개발), 노후포장도로 정비공사, 사무관리비

붙임 : 1. 사업소별 포트홀 빈발구간 현황 1부.

2. 합동조사 결과 양식 1부. 끝.