문서번호	도로보수과-12774
결재일자	2017.12.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
권세봉		강종훈	12/04 배광환
협 조
	주무관			이상하

2017년 교통사망사고 줄이기

개선사업 작업완료 보고

2017.  12. 04.(월)

서부도로사업소

(도로보수과)

2017년 교통사망사고 줄이기

개선사업 작업완료 보고

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2017년 교통사망사고줄이기사업(퇴계로3가 외 10개소)

○ 위치 및 개선내용

- 중구 퇴계로3가~퇴계로5가 : 차선분리대 설치, 노면표시 차로재조정

- 중구 광희R~한양공고      : 차선분리대 설치, 노면표시 차로재조정

- 은평구 응암로 응암시장     : 차선분리대 설치, 노면표시 차로재조정

- 은평구 연서로 연신우체국   : 차선분리대 설치, 노면표시 차로재조정

- 은평구 연서로 연서시장     : 차선분리대 설치, 노면표시 차로재조정

- 마포구 백범로 롯데캐슬     : 차선분리대 설치

- 마포구 신촌로 65~83     : 차선분리대 설치

- 마포구 신촌로 12~21     : 차선분리대 설치

- 마포구 양화로 177~183  : 차선분리대 설치

- 마포구 신촌로 183~201  : 차선분리대 설치

- 용산구 녹사평대로 195     : 차선분리대 설치

○ 예산배정액 : 151,000천원

□ 작업완료내역

○ 건   명 : 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 작업지시(제16차)

- 시 공 사 : (주)렉스   대표 전현신

- 작업기간 : 2017. 09. 25. ~ 2017. 10. 31.

- 공사금액 : 34,560천원(관급포함)

- 작업내역

구 분	당 초	변 경	증·감	증·감 사유	비 고
백색차선 도색	465m	688m	증) 223m	실 작업량 증, 감으로 인한 물량변경
황색차선 도색	1,505m	1,366m	감) 139m
청색차선 도색	320m	350m	증) 30m
문자․기호 도색	1,206m	1,287m	증) 81m
문자․기호 재도색	0m	77m	증) 77m
노면표시 제거	3,481m	3,666m	증) 185m
합 계	6,977m	7,434m	증) 457m

○ 건   명 : 관급자재(차선분리대) 구매 설치

- 시 공 사 : (주)세이프로드   대표 조동열

- 작업기간 : 2017. 09. 29. ~ 2017. 11. 30.

- 공사금액 : 39,210천원

- 작업내역

구 분	당 초	변 경	증·감	증·감 사유	비 고
차선분리대	200경간	200경간	-	-	현장설치도

○ 건   명 : 관급자재(차선분리대) 구매 설치

- 시 공 사 : (주)신화알에스   대표 설지훈

- 작업기간 : 2017. 09. 29. ~ 2017. 10. 30.

- 공사금액 : 21,717천원

- 작업내역

구 분	당 초	변 경	증·감	증·감 사유	비 고
차선분리대	96경간	96경간	-	-	현장설치도

○ 건   명 : 관급자재(차선분리대) 구매 설치

- 시 공 사 : 신도산업(주)   대표 황동욱

- 작업기간 : 2017. 09. 29. ~ 2017. 11. 20.

- 공사금액 : 29,398천원

- 작업내역

구 분	당 초	변 경	증·감	증·감 사유	비 고
차선분리대	172경간	172경간	-	-	현장설치도

○ 건   명 : 관급자재(차선분리대) 구매 설치

- 시 공 사 : (주)세이프티코리아   대표 유호연

- 작업기간 : 2017. 09. 29. ~ 2017. 10. 29.

- 공사금액 : 26,693천원

- 작업내역

구 분	당 초	변 경	증·감	증·감 사유	비 고
차선분리대	118경간	118경간	-	-	현장설치도

○ 건   명 : 관급자재(차선분리대) 구매 설치

- 시 공 사 : (주)하이큐   대표 송재현

- 작업기간 : 2017. 09. 29. ~ 2017. 10. 29.

- 공사금액 : 26,910천원

- 작업내역

구 분	당 초	변 경	증·감	증·감 사유	비 고
차선분리대	158경간	158경간	-	-	현장설치도

○ 공사금액

(단위 : 천원)

공 사 명	당 초	변 경	증·감	비 고
노면표시(관급포함)	32,552	34,560	증) 2,008	연간단가
차선분리대(관급)	143,928	143,928	-	현장설치도

○ 사업비 집행 현황

(단위 : 천원)

사 업 명	배정액	노면표시	차선분리대	집행잔액
교통사망사고 줄이기사업	151,000	본공사 예산으로 집행	143,928	-7,072 (차선분리대 유지 보수예산으로 활용)

○ 작업완료 사진

퇴계로3가: 차선분리대 설치, 차로재조정	광희R: 차선분리대 설치, 차로재조정

백범로 165: 차선분리대 설치	신촌로 65: 차선분리대 설치

신촌로12: 차선분리대 설치	양화로177: 차선분리대 설치

신촌로183: 차선분리대 설치	응암시장: 차선분리대 설치, 차로재조정

연신우체국: 차선분리대 설치, 차로재조정	녹사평대로 195: 차선분리대 설치

연서시장: 노면표시 차로재조정 (차선분리대는 시설보수과에서 설치)

□ 향후계획

○ 상기 보고내용과 같이 실 작업완료분에 대하여 기성준공 처리.

○ 2017년 교통사망사고 줄이기사업 작업완료 통보(교통운영과)

붙 임 : 1. 노면표시 유지보수공사 제16차 작업완료 내역서 1부.

2. 교통개선사업 작업완료 도면 각 1부(별도첨부)..

3. 교통개선사업 작업완료 사진대지 각 1부(별도첨부).  끝.