투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	준공기한 연기 요청(길음교 등 3개소 내진보강공사)

1. 시설보수과-10634(2017.12.01.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 시행중인 『길음교 등 3개소 내진보강공사』의 준공기한을 아래와 같이 연기코자 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 길음교 등 3개소 내진보강공사

나. 계약상대자 : ㈜유진아이엠씨 대표 백영철

다. 준공기한 연기

- 당초 : 2017. 11. 01. ∼ 2017. 12. 31.

- 변경 : 2017. 11. 01. ∼ 2018. 04. 30.

라. 연기사유

- 절대공기 부족 및 동절기 공사 불가

마. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시

바. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 1. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

2. 준공기한 연기 검토보고서 1부.  끝.

	시설보수과장
주무관	오광준		시설보수과장	12/04 이근봉
협조자
시행	시설보수과-10670	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913 (번동)	/	www.seoul.go.kr
전화	02-944-5450	/전송	02-945-5073	/	okwjun@seoul.go.kr	/	대시민공개