문서번호	시설과-7701
결재일자	2017.12.4.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설과장		관리부장
박도원	조대복	오임석		12/04 박진순
협 조	전략기획실장		김정열
	총무과장		이행용

황새마을 시설개선 기계설비공사 설계변경 보고

2017. 11월

서울대공원

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

황새마을 시설개선 기계설비공사

설계변경 보고

「황새마을 시설개선 기계설비공사」와 관련하여 현장 여건을 반영하기 위한 설계변경 사항에 대하여 보고 드림.

1		공사개요

□ 공 사 명: 서울대공원 황새마을 시설개선 기계설비공사

□ 공사기간: ‘17. 10. 17. ~ 12. 30.

□ 계약상대자: 자연엔지니어링(주) 대표 김순영

□ 계약금액: *************

□ 공사내용:

○ 황새마을 시설개선 기계설비공사(내실 121.3㎡, 외부 방사장 1,351.3㎡)

- 내실 난방배관공사, 위생배관공사, 철거공사

- 외부 방사장 위생배관공사

- 기계실 장비설치공사, 가스배관공사

2		설계변경 검토내용

□ 관련문서 및 관련근거

○ 시설과-6854(‘17.11.02.)

- 현장지시부 1호 안내(공정회의 합의 내용 사항)

○ 공사계약 일반조건 제19조의5(발주기관의 필요에 의한 설계 변경)

□ 주요 변경내용

구 분	당 초	변 경	변경 사유
장비설치공사	가스보일러 10만kcal/h 1대	▪가스보일러 45,000kcal/h 3대 ▪온수방열기 10주 6대 ▪온수방열기 20주 2대	▪저녹스버너제품 규격 반영 ▪누락 물량 반영
위생기구설치공사	▪가로꼭지 D20 4개 ▪가로꼭지 D25 12개	▪가로꼭지 D20 6개 ▪가로꼭지 D25 18개 ▪청소호스릴 D25 12개	▪사용자 요구사항 반영
급수급탕배관공사	▪옥외방사장 급수관 스테인레스배관 D25~D40	▪옥외방사장 급수관 PE관 D25~D40 ▪코어뚫기 8개소 ▪사다리 1개 제작	▪시공 품질 향상 ▪현장 여건 반영
오배수 배관공사	▪오버플로우관 D150 ▪밸브박스, 주철게이트밸브 ▪바닥배수구 D150 6개	▪오버플로우관 D50 ▪밸브박스, 주철게이트밸브 삭제 ▪코어뚫기 8개소 ▪바닥배수구 D150 16개 및 손잡이 제작	▪시공 품질 향상 ▪사용자 요구사항 반영
연도설치공사	STS 재질 시공	PVC 재질 시공	▪공사비 절감

□ 공종별 변경사항

(단위: 천원)

연번	공 종 별	변경 내용	변경금액
1	장비 설치공사	▪가스보일러 45,000kacl/h 3대 ▪온수방열기 10주 6대, 20주 2대	********
2	위생기구설치공사	▪가로꼭지 D20 6개, 가로꼭지 D25 18개 ▪청소호스릴 D25 12개	*******
3	급수급탕 배관공사	▪스테인레스배관(D25, 40) 및 부속자재 물량 감 시공 ▪PE관(D25, 40) 및 부속자재 물량 감 시공 ▪구멍뚫기 8개소 ▪사다리 제작 1개소	*******
4	오배수 배관공사	▪PVC관(D50) 및 부속자재 물량 증 시공 ▪PVC관(D150) 및 부속자재 물량 감 시공 ▪구멍뚫기 8개소 ▪주철게이트밸브, 밸브박스 삭제 ▪바닥배수구 증 시공 및 손잡이 18개소 추가 시공	*******
5	연도 설치공사	▪연도 STS재질에서 PVC 재질로 변경 시공	*******
합 계			********

3		설계변경 사항

□ 설계변경 내역

(단위: 천원)

구 분	변 경 전	변 경 후	증 감	비 고
도급금액	*******	*******	********
공사기간	‘17.10.17.~12.30.	‘17.10.17.~’18.03.31.	증 91일간	사고이월

○ 공사기간 연장 사유: 선행공정인 건축공사 절대공기 부족(사고이월)

□ 예산확보

○ 증감 금액: 증 11,238천원

○ 증가금액(11,238천원)은 「서울대공원 황새마을 시설개선 기계설비공사」낙찰차액(15,292천원) 예산 사용

○ 예산과목:　공원이용시민만족도향상, 동물사관리기능및야생동물종보전, 공원안전시설보수및정비, 시설비

4		조치사항

□ 공사 일정에 차질이 없도록 위와 같이 설계변경 시행코자 함.

붙임  1. 현장지시부 2부.

2. 설계변경내역서 및 도면 1부.

3. 설계변경내역서 갑지 1부.  끝.