아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	중차량노선 시설물 성능개선 실시설계용역 준공기한 연기요청

1. 교량안전과-21779호(2017.11.30.)와 관련입니다.

2. 우리 과에서 시행중인 “개봉고가 성능개선 실시설계용역” 외 1건에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 연기 내역

용 역 명	도 급 자	용역기간
		당 초	변 경
개봉고가 성능개선 실시설계용역	㈜경동엔지니어링	‘17.6.1∼‘17.12.27	‘17.6.1∼‘18.3.31
증산교 등 3개소 성능개선 실시설계용역	㈜한국종합기술	‘17.5.26∼‘17.12.21	‘17.5.26∼‘18.3.31

나. 지체상금 : 미부과

다. 연기사유 : ***********************************************************************************

라. 예산과목 : 교량관리, 일반교량관리, 중차량노선 시설물 성능개선, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임 1. 준공기한 연기 검토 보고서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 각 1부.  끝.

	교량안전과장
주무관	김용태		교량기획팀장	오재영		교량안전과장	12/04 한유석
협조자
시행	교량안전과-22022	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문별관 1동 2층	/
전화	2133-1947	/전송	2133-1429	/	polar68@seoul.go.kr	/	부분공개(5)