문서번호	시설보수과-5514
결재일자	2017.12.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설보수과장
박종헌		12/04 권태선
협 조
	주무관		신동헌

공사현장 실정사항 검토 보고

- 신길로 매몰교량 철거공사 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 12.

남부도로사업소

(시설보수과)

공사현장 실정사항 검토 보고

- 신길로 매몰교량 철거공사 -

우리사업소에서 시행중인 『신길로 매몰교량 철거공사』의 공사현장 실정보고(흙쌓기 시공변경) 승인 요청이 있어 이에 대한 검토 사항 임

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 신길로 매몰교량 철거공사

공사기간 : 2017.08.22. ~ 2017.12.31.

공사개요 : 구조물헐기 403.64㎥, 아스콘포장깨기 131㎥, H-Beam설치 및 철거 16본, 아스콘포장 419㎡, 보도포장 184㎡, 가시설공 1식

공 사 비 : \ 456,201천원

(도급비 401,116천원, 관급비 12,526천원, 이전비 42,559천원)

시 공 사 : 제이엠건설  대표 왕영호

감 독 청 : 서울시설공단 공사감독1처

Ⅱ		시설관리공단 실정보고 내용

【관련공문 : 시설관리공단 공사감독 1처-9315(2017.11.30.)호】

가. 흙쌓기 변경 관련

상기 공사의 매몰교량 철거 후 포장면 하부 토공은 보조기층재로 흙쌓기(노체,노상)시공토록 설계되었으나 매몰교를 철거한 후 존치될 지하매설물 하부 및 주위에 보조기층재로 완벽한 흙쌓기 시공이 어려운 실정임.

흙쌓기 재료를 석분으로 변경하고자 하며 이에 대한 단가적용은 견적가로요청한 실정임

검토의견

- 매몰교량 철거후 포장면 하부 토공은 지하매설물이 존치하는 지하로 도로개설의 흙쌓기(노체,노상) 시공이 아닌 되메움 재포설 및 물다짐의 시공으로 변경하여 지하매설물 하부의 공극이 발생치 않도록 함이 타당하며, 적절한 되메움재는 모래나 석분으로 판단되나 감독자 확인결과 양질의 모래는 확보하기 어려운 실정이므로 석분으로 되메움과 충분한 물다짐을 실시하여 도로침하 원인인 지하매설물 주변의 공극이 없도록 시공함이 적절한 것으로 사료됨.

- 견적가 적용을 요청한 석분단가에 대하여는 『지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제7조(원가계산시 단위당 가격의 기준)』규정에 의거 건설재료 및 자재단가는 거래실례가격 또는 통계법 제15조의 규정에 의한 지정기관이 조사하여 공표한 가격, 감정가격, 유사한 거래실례가격, 견적가격 순으로 적용토록 명시하는 바, 견적가 적용은 적절하지 않으며 지정기관이 조사하여 공표한 가격으로 적용함이 타당함

나. 시설관리공단 검토결과

도급사에서 제출한 토공 흙쌓기 변경은 적정하므로 도급사 의견대로 시공하여 도로품질을 확보하고자 하며 석분에 대한 자재단가는 지정기관이 조사하여 공표한 가격을 적용함이 타당한 것으로 사료됨.

※ 개략공사비 : 증)6,368천원

Ⅲ		검 토 내 용

시설관리공단 검토 결과와 같이 교량 하부에 존치하고 있는 지하매설물로 인해 기존 설계대로 흙쌓기(노상,노체)의 시공은 어려운바, 되메움 재포설 및 물다짐의 시공으로 변경하여 시공하고 되메움재로 사용코자했던 모래는 품기현상으로 인해 공정에 맞춰 사용이 어려운바, 대체가 가능한 석분을 사용코자하며, 석분에 대한 견적가 적용은 적절하지 않으며 지정기관이 조사 공표한 가격으로 적용함이 타당하다고 판단됨

또한, 석분 사용은 철거 1,2단계에 사용하고 철거 3단계시에는 안양천에서 나온 하천준설토(현장확인결과 사용 가능한 모래임)를 사용코자 함.

안양천 준설토

※ 구로구청 치수과-19405(2017.11.14.)호 및 시설보수과-5409(2017.11.29.)

Ⅳ		조 치 계 획

공사 시행의 품질 확보를 위하여 위 보고 내용대로 시행함이 타당함으로 시설관리공단에 현장품질 및 안전관리 철저, 시공시 감독업무에 철저를 기하여 공사 시행토록 통보 조치하고,

시설물 유지관리 및 공사의 원활한 추진을 위하여 공사비 변경사항은 추후 설계변경시 반영토록 조치하여 공사 시행에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 시설관리공단 실정보고 관련서류 1부.  끝.