문서번호	정보기획담당관-19687
결재일자	2017.12.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
실무사무관	IT투자심사팀장	정보기획담당관
이희옥	김천억	12/04 이기완

「2017년 정보시스템 감리 용역 」계약 변경 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 12.

정 보 기 획 단

(정보기획담당관)

「2017년 정보시스템 감리 용역 」계약 변경 계획

2017년 정보시스템 통합 감리 용역으로 당초 19개 정보화사업 감리를   ‘17.12.31까지 계약하였으나, 감리제외 1개사업 발생 및 ‘18년도까지    진행되는 7개 정보시스템 감리용역을 위해 계약변경을 추진코자 함

1		사업개요

○ 사 업 명 : 2017년 정보시스템 감리 용역

○ 계약기간 : 2017. 6.20. ~ 2017.12.31.

○ 계약업체 : ㈜한국정보기술단

○ 계약금액 : 금칠억사백만원정(금704,000,000원정)

○ 사업내용 : ‘보육포털시스템 유지관리 및 입소대기시스템 이관’(보육담당관)  등 19개 정보시스템 구축사업별 감리 추진

○ 추진경과(19개 감리사업) :  완료 1건, 진행 17건, 제외결정 1건

2		계약 변경 개요

○ 변경내용

구 분	당 초	변 경
계약기간	‘17. 6.20 ~ ’17.12.31	‘17. 6.20 ~ ’18. 8.31
과업내용	19개 정보시스템 감리	18개 정보시스템 감리
계약금액	704,000천원	657,364천원 (감액 : 46,636천원)

○ 변경사유

********************************************************

********************************************************************************************************************************************

******************************************

*************************************************************************************

***********************************************

************************************************

○ 연기사유 귀책소재 : 서울특별시

○ 지체상금 부과여부 : 미 부과

3		향 후 계 획

○ 계약 체결 절차에 따라 감리용역 변경계약 추진        : ‘17.12월중

○ 부분 준공검사 실시 및 기성금 지급                   : ‘18. 1월중

- 감리사업중 ‘18. 1월까지 완료된 감리사업에 대한 부분준공

붙임: 1. 합의각서 1부

2. 2017년 통합감리 용역 사업별 진행현황 1부. 끝.