문서번호	시설보수과-5513
결재일자	2017.12.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설보수과장
박종헌		12/04 권태선
협 조
	주무관		신동헌

공사현장 실정사항 검토 보고

- 신길로 매몰교량 철거공사 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 12.

남부도로사업소

(시설보수과)

공사현장 실정사항 검토 보고

- 신길로 매몰교량 철거공사 -

우리사업소에서 시행중인 『신길로 매몰교량 철거공사』의 공사현장 실정보고(지장물 이전외 2) 승인 요청이 있어 이에 대한 검토 사항 임

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 신길로 매몰교량 철거공사

공사기간 : 2017.08.22. ~ 2017.12.31.

공사개요 : 구조물헐기 403.64㎥, 아스콘포장깨기 131㎥, H-Beam설치 및 철거 16본, 아스콘포장 419㎡, 보도포장 184㎡, 가시설공 1식

공 사 비 : \ 456,201천원

(도급비 401,116천원, 관급비 12,526천원, 이전비 42,559천원)

시 공 사 : 제이엠건설  대표 왕영호

감 독 청 : 서울시설공단 공사감독1처

Ⅱ		시설관리공단 실정보고 내용

【관련공문 : 시설관리공단 공사감독 1처-9220(2017.11.29.)호】

가. 지장물 이전 외 2건

상기 공사의 보도구간에 볼라드 및 도로휀스, 안내표지판등이 설치되어 공사시저촉되는 실정임.

매몰교량 하부에 한전 및 통신관로가 부설되어 이를 고정하는 고정철물이설치되어 있는 실정임.

당초 계약내역에 폐기물상차비가 누락되어 도급사에서 반영을 요청함

검토의견

- 보도구간에 설치된 볼라드4개소, 도로휀스10경간, 안내표지판2개소는 철거후 임시 저장소에 보관하고 공사완료시 재설치함이 타당하며 도급사에서 제출한 볼라드 및 도로휀스 철거단가는 동일단가로 설치단가의 30%를 적용하여 적정한 것으로 사료되나, 안내표지판의 철거는 표준품셈에 명시된 철거품으로 산정함이 타당한 것으로 사료됨

- 매몰교량 하부에 설치된 한전 및 통신관로의 고정철물은 철거작업시 저촉되므로 제거함이 타당하며 도급사에서 제출한 잡철물철거 단가는 잡철물제작단가의 30%를 적용하여 과다한 것으로 판단되어 설치단가의 30%와 지하할증 10%를 적용하여 산출함이 타당한 것으로 사료됨

- 누락된 폐기물상차에 대한 공사비는 반영함이 타당한 것으로 사료됨

나. 시설관리공단 검토결과

도급사에서 제출한 보도구간 지장물에 대한 철거,재설치와 교량하부의 잡철물철거, 폐기물상차 누락반영은 적정하며 안내표지판 및 잡철물철거 산출단가에 대하여는 재산정함이 타당한 것으로 사료됨.

※ 개략공사비 : 증)4,393천원

Ⅲ		검 토 내 용

시설관리공단 검토 결과와 같이 볼라드, 보행자 울타리(도로휀스),안내표지판은 철거후 재설치 함이 타당하며, 볼라드 및 보행자 울타리의 철거단가는 설치단가의 30%를 적용하고, 안내표지판은 표준품셈(10-5)에 명시된 철거품을 적용하는 것이 타당하다고 보며,

※ 영등포구청 도로과-18231(2017.9.12.)호 : 보행자울타리 및 볼라드는 공사완료   후 원상복구

교량 하부에 설치된 한전 및 통신관로의 고정철물은 철거작업시 잡철물 설치 단가의 30%와 지하작업 할증(지하 4m미만)을 10% 적용하고, 설계서에 누락된 폐기물상차에 대하여는 공사비를 반영함이 타당하다고 판단됨.

Ⅳ		조 치 계 획

공사 시행의 품질 확보를 위하여 위 보고 내용대로 시행함이 타당함으로 시설관리공단에 현장품질 및 안전관리 철저, 시공시 감독업무에 철저를 기하여 공사 시행토록 통보 조치하고,

시설물 유지관리 및 공사의 원활한 추진을 위하여 공사비 변경사항은 추후 설계변경시 반영토록 조치하여 공사 시행에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 시설관리공단 실정보고 관련서류 1부.  끝.