문서번호	한양도성도감-12339
결재일자	2017.12.4.
공개여부	부분공개(2 5 7)
방침번호

					시 민
주무관	도성관리팀장	한양도성도감과장
채희창	곽동진	12/04 심말숙
협 조

- 문화재 보호 및 순성객의 안전사고 예방을 위한 -

한양도성 통합 관제망 구축(3차) 실시설계 용역 완료보고

2017. 12.

문화본부

한양도성도감

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	******KT
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

- 문화재 보호 및 순성객의 안전사고 예방을 위한 -

한양도성 통합 관제망 구축(3차) 실시설계 용역 완료보고

한양도성 통합관제망 구축 사업의 일환으로 남산구간 및 인왕·백악 지역에 재난방재시설(CCTV 등)을 구축하기 위한 실시설계 용역을 완료하고, 용역 결과와 향후 계획을 보고 드림

Ⅰ				용역개요
					ㅊㅊ	ㅊ

□ 용 역 명 : 한양도성 통합 관제망 구축(3차) 실시설계 용역

□ 용역업체 : *******

□ 용역기간 : ’17. 11. 10 ~ ’17. 11. 24.

□ 계약금액 : 8,140천원

□ 과업개요

- 범   위 : 한양도성 남산구간 및 인왕·백악 지역

- 내   용

․ 범위 내 CCTV 설치 및 타 기관 CCTV 연계 방안

․ 한양도성 통합관제센터 VMS와 연계 방안

Ⅱ				추진경위
					ㅊㅊ	ㅊ

□ ’17. 10. 31. : 한양도성 통합관제망 구축사업(3차) 추진 계획

□ ’17. 11. 02. : 기술용역 타당성 심사 완료

□ ’17. 11. 10. : 용역계약 체결 및 착수

□ ’17. 11. 12. : 1차 현장 조사(CCTV 설치 지점 등 확인)

□ ’17. 11. 17. : 2차 현장 조사(전원 및 통신회선 인입 방안)

□ ’17. 11. 21. : 인왕·백악 지역 CCTV 연계 협의

□ ’17. 11. 24. : 실시설계용역 준공계 제출

Ⅲ				용역결과
					ㅊㅊ	ㅊ

□ 주요설비 현황

지 역		카메라	폴	비고
남산지역 (신규 구축)	1구역	10대	5개
	2구역	10대	5개
	3구역	8대	4개
백악·인왕 (CCTV 연계 대상)		********************** **********************************************		20대 연계 기준으로 VPN(보안장비) 등 설계에 반영

□ 주요내용

- 한양도성 통합관제시스템과의 연계를 위한 네트워크 구성 방안

- 지역별 통신 및 전기 인입 위치 결정 및 기존 시설 활용 방안

- 주요 자재 및 장비 호환성 등 검토

□ 소요예산 : 237백만원

- 남산 지역 : 224백만원

- 백악·인왕 : 13백만원(CCTV 20대 연계 기준)

Ⅳ				추진사항 및 향후계획
					ㅊㅊ	ㅊ

□ ’17. 11. ~ 12. : 남산 지역 사업 시행 방침 및 계약완료

□ ’18. 01. ~ 05. : 공사 시행 및 완료

붙임  1. 설계 설명서 1부

2. 설계 내역서 1부.

3. 도면 등 용역 성과물 1부(별도 붙임).  끝.